문서번호	설비부-12203
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	08/26 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사』

설비분야 준공(납품)기한 연장 검토 보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사』

설비분야 준공기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사』설비분야(전기,통신)공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ **********************************

○ *********************************************

○ *******************************************

○ ****

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	******* ****	**	***********************	*************
		**	***********************	***********
******	*****	**	***********************	**********

○ *********************

Ⅱ		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 설비분야 준공기한 연장 검토 보고 (전기, 통신공사 및 관급자재)

[율곡감 제2021-231호 ('21.08.24.)]

Ⅲ		검토내용

○ 공사·관급자재 변경내용

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	******* ****	****	**	*************	***********	***********
			**	***********	***********	***********
**************	*****	******	**	**********	***********	***********
*************	**********	*** ****	**	*********	***********	***********
*********** ******************	*******	************	**	**********	***********	***********

○ 변경사유 : 선행공정(토목) 준공기한 연장에 따른 후속공정 준공기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행 공종(토목) 준공기한 연장으로 후속 공정 설비분야(전기,통신) 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 설비분야공사 및 관급자재의 준공(납품)기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경 계약 의뢰 하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 토목부 준공기한 연장 방침 1부.  끝.