문서번호	정수시설과-7938
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		이천영	08/26 이달영
협 조
	주무관			정유성

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

활성탄흡착지 현장제어반 제작 구매 설치 설계변경(정산) 계획 보고

2021. 08.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

「활성탄흡착지 현장제어반 제작 구매 설치」

설계변경(정산) 계획 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 「활성탄흡착지 현장제어반 제작 구매 설치공사」의 제경비 정산에 따른 설계변경 계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : 활성탄흡착지 현장제어반 제작 구매 설치

○ 계약기간 : 2021 . 5. 17 ~ 2021 . 9. 14.

○ 계약금액 : 금228,017,400원

○ 계약업체 : ㈜누리제어시스템 대표 박상진

○ 사업내용 : 현장제어반 10면 교체 및 S/W프로그램, 케이블 정비

Ⅱ		설계변경 내용

○ 계약기간 : 변경 없음

○ 계약금액

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	228,017,400원	225,560,000원	감)2,457,400원

○ 세부 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
건강보험료	754,581원	-	감)754,581원
노인장기요양보험료	86,927원	-	감)86,927원
연금보험료	989,975원	-	감)989,975원
일반관리비 및 이윤	5,697,666원	5,295,149원	감)402,517원
부가세	3,377,917원	3,154,517원	감)223,400원

○ 설계변경 사유

- 보험료(건강, 연금, 노인장기요양보험) 증빙서류 미제출로 인한 감액

Ⅲ		조치의견

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최 후 심의 결과를 반영하여 변경계약 후 준공처리코자 함.

Ⅳ		향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일시 : 2021. 8. 27.(금) 15:00

- 심의위원

· 위원장 : 정수시설과장

· 위  원 : 공업6급 고명규, 공업6급 송재홍, 공업6급 이민화

- 주요 심의내용

· 설계변경 타당성

· 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

○ 설계변경 및 변경계약

○ 준공처리

붙임 1. 설계변경(정산) 내역서 1부

2. 설계변경 검토의뢰서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최의견서 1부.  끝.