투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	북서울꿈의숲 방문자센터 리모델링 전기공사 사업기간 변경 요청

1. 북서울꿈의숲관리사무소-3577(2021.08.25.)호와 관련입니다.

2. 북서울꿈의숲 방문자센터 리모델링 전기공사 사업기간을 아래와 같이 변경하오니

처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	당초	변경	사유
북서울꿈의숲 방문자센터 리모델링 전기공사	착공일로부터 120일	2021년 12월 27일	공고 및 계약체결 기간 등 소요일수 발생

.  끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	유수형		관리팀장	代이민영		북서울꿈의숲관리사무소장	08/26 이정환
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-3602	(		)	접수		(		)
우	01783	서울특별시 강북구 월계로 173	/
전화	02)2289-4025	/전송	02)2289-4040	/	yaainn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)