문서번호	도로보수과-7780
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	08/26 고영준
협 조

『2021년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』

작업계획(4차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  08.

북부도로사업소

(도로보수과)

2021년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

작업계획(4차) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 「2021년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)」와 관련 노후포장도로 정비공사 구간 및 포장면과 맨홀 단차발생 등 평탄성이 불량한 맨홀 정비계획을 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2021년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

∘ 공사기간: 2021. 4. 16. ~ 12. 31.

∘ 공사개요: 불량맨홀 정비 614개소

∘ 총공사비: **************************

∘ 도 급 자: *******************

▢ 4차 작업계획 내용

∘ 위       치 : 노원구 동일로 등 159개소

∘ 작 업  기 간 : 2021. 08. 27. ~ 09. 30.

∘ 사전협의 물량: 162개소

∘ 정 비   물 량: 159개소 (맨홀관리기관 정비, 민원사항 등)

(단위: 개소)

구 분	총계	하수도	상수도	통 신	전 기	소화전	기 타
물 량	159	55	36	54	12	2	-

∘ 작업완료 현황(1~3차)

(단위: 개소)

구 분	총계	작업 완료 및 시행				4차계획	잔여 수량
		계	1차	2차	3차
물 량	614	303	110	101	92	159	152

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구 분	계약금액	작업완료 (1~3차 작업)	개략공사비 (4차 작업)	잔 액	비고 (낙찰차액)
도급비	930,391	451,430	172,800	306,161	128,609
총공사비	930,391	451,430	172,800	306,161

▢ 조치계획

∘ 상기 작업계획 물량(159개소)에 대해 「2021년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)」에 작업지시하여 정비

∘ 주, 야간공정 물량변경에 따른 설계변경(1회)추진

∘ 작업완료 보고서에 따라 실정산 처리 (주, 야간 작업검토)

∘ 맨홀 철개수령 운반비 실정산 처리

∘ 긴급정비대상인 경우 추가 작업

붙임  1. 작업지시서(4차) 1부.

2. 작업내역서(4차 작업지시) 1부.

3. 위치도 및 사진대지(4차) 1부(별도첨부).  끝.