문서번호	급수운영과-16276
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
이훈재		08/26 채재일
협조
	주무관		성영한

제1차 단가계약 기성(정산) 보고

(2021년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

2021. 8.

중부수도사업소

(급수운영과)

『2021년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』

제1차 단가계약 기성(정산) 보고

『2021년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속 단가계약)』의 계약업체로부터 제1차 기성요청서가 접수되어 상주기술인(감리) 설계도서 검토 등 관계규정에 따라 조치하고자 보고 드림.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2021년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

○ 공사개요: 아스팔트 90.7a, 콘크리트 0.4a, 보도블록 8.9a, 아스팔트표층 100.6a

○ 공사기간: 2021. 6. 3. ~ 2022. 6. 30.

○ 계약금액: **********************************

○ 도 급 자: *****************

○ 건설사업관리기술인(감리): *********

□ 제1차 단가계약 기성(정산) 보고

1. 설계 변경

○ 일    시: 2021. 8. 24.(화요일)

○ 설계변경 사유

- 상수도 공사 관련, 포장복구 계약 물량 증감 및 신규 공종 발생

- “상수도사업소 유지관리 실태 감사” 지적사항에 따른 포장복구공사 공통 일위대가 품 개선(아스팔트포장, 소파보수, 지세-B타입 등 5개 공종)

○ 설계변경 내용: 시공물량 증가(증 9.6a)에 따른 계약금액 변경

- 물량 증가: 잔토소운반(굴삭기0.18상차), 2.5DT 외 106개 공종

- 물량 감소: 아스팔트 포장절단, 200mm이하 외 71개 공종

- 신규 공종: 도자블럭, 200*200*25mm 1개소

○ 단가 적용

- 물량 증감에 대한 적용: 계약 당시 단가 반영

- 신규 공종 및 자재 적용: 설계단가에 낙찰율(86.753%) 반영

2. 예비 기성 검사

○ 일    시: 2021. 8. 25.(수요일)

○ 예비준공 검사자: 건설사업관리기술인 이달수, 현장소장

○ 예비 기성검사 내용: 포장복구 상태 점검

○ 점검 결과: 시공 상태 양호

- 시공 수량: 718개소(아스팔트 44.08a, 보도 3.87a, 표층 36.71a)

3. 기성(정산) 시행

○ 정산기간: 2021년 6월 3일 ~ 2021년 7월 31일

○ 정산개요: 도로 포장 84.66a, 718개소

공 종	단위	수 량	건 수	비고
계	a	84.66	718
아스팔트 포장	a	44.08	587
보도블록 포장	a	3.87	11
아스팔트 표층	a	36.71	120

○ 정산금액: ************

- 1차수 정산금액(2021년)

(단위 : 원)

계약금액	전회 정산액	금회 정산액	잔여금액
**************	*	***********	************

- 금회 정산 금액

(단위 : 원)

공 사 명	금회 정산금액(원)			비고 (공사코드)	추산 번호
	계	기 지급액	금회 추산액
*	***********	**********	***********
*********** *********	**********		**********	*****
*********** **********	***********		***********	*****
************ *****	***********	**********	***********	*****
************** ********	**********		**********	*****

※ 기 지급액: ’21. 6. ~ ’21. 7.까지 현장근로자 노무비 지급액

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사비 33201)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(내용연수 22108)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(누수복구 31202)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후밸브정비 41103)

붙임  1. 기성 내역서(1회) 1부.

2. 단가계약 정산 요청서 1부.

3. 설계변경 관련자료 각 1부.

4. 기성 검토보고서(건설사업관리기술인) 1부.  끝.