문서번호	조경과-10299
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
유승아	김방용	전결 08/27 안수연

- 2021 시민주도 도시녹화 주민제안사업 -

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(강북구)

2021. 8.

푸른도시국

[조   경   과]

- 2021 시민주도 도시녹화 주민제안사업 -

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(강북구)

2021 시민주도 도시녹화 주민제안사업 지원 관련 보조금 단체의 예산 집행계획 변경에 대하여 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토보고 드림

□ 지원사업 개요

❍ 사 업 명 : 오동근린공원 협동정원 가꾸기

❍ 지원단체 : 오동근린공원 가꾸기 자원봉사자 모임

❍ 대 상 지 : 강북구 미아동 1-53 일대 등

❍ 사업내용 : 나대지 내 정원 조성 등

❍ 총사업비 : ********************************

❍ 협약 자치구 : 강북구(공원녹지과)

	2021 시민주도 도시녹화 주민제안사업(보조금)
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 10. - 선정단체 : 19개 자치구 31개 공동체 - 총사업비 : 380백만원(자치단체경상보조금) - 사업내용 : 생활공간 녹화를 위한 보조금 지원

□ 변경사항

❍ 변경내용 : 사업진행비 절감에 따른 재료비로 비목변경

❍ 변경사유

- 사업진행비(운반비, 임차비, 홍보비 등) 절감분을 재료비로 비목 변경하여 초화류 등 사업에 필요한 재료 등을 추가 구매하고자 함

❍ 세부 변경사항

(단위 :천원)

비 목	세부항목	보 조 금		자 부 담		비 고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
계		******	******	*****	*****
재 료 비	식물재료비	*****	******			*******
	기반조성재료비	***	***
사업진행비	인건비 등	*****	*****	*****	*****	*******
활동비	소모품 등			***	***

❍ 자치구 검토결과

- 현장여건을 반영하여 운반비, 임차료 절감분을 재료비(식물)로 활용하는 사항으로 원활한 사업 추진을 위해 필요한 사항으로 판단됨

□ 검토결과

❍ 사업진행비 절감분을 재료비로 활용, 정원조성에 필요한 녹화자재 등을 추가 구입하기 위한 경미한 사항으로 변경 승인코자 함

□ 향후계획

❍ 검토결과 및 변경승인 통보(시 → 강북구)

붙  임 : 자치구 공문 각 1부.  끝.