문서번호	설비부-12304
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	08/27 김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

설계변경(총차, 1차) 검토보고

2021. 8월

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

설계변경(총차, 1차) 검토보고

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』관련, 한국전력 지중화 공사 지연으로 1차 내역을 조정하고자 하며, 기 승인사항 및 주휴수당 반영에 따른 설계변경을 시행코자 검토보고 드림

***************************************************

*************************************************************

1		공사개요

○ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

○ 규    모 : 지하 2층/지상 7층, 연면적 2,711,51㎡

○ 계약현황

(단위 : 원)

차 수	계 약 금 액	계 약 기 간	계 약 업 체
총 차	***********	2020.08.12. ~ 2022.08.11.	㈜도원 외 1개사
1 차	***********	2020.08.12. ~ 2021.08.31.

○ 건설사업관리단 : 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 외 1개사

2		관련근거

○ 전기공사 실정보고 검토보고(설비부-4760호, ’21.04.12.)

○ 건설사업관리단 설계변경 검토보고(광역 CM-0176호, ’21.08.25.)

3		검토내용

○ 설계변경 사유

- 한국전력 지중화공사 지연으로 1차 공사의 전력인입 및 전력간선 설비공사를 1차 준공기한 내에 시공할 수 없기에, 1차 준공기한 내에 시공 가능한 물량을 재산출하여 1차 공사 내역 조정

‧ 한국전력 지중화공사 지연 : 당초 ’21.08.21. → 변경 ’21.09.10.(완료예정)

- 전기공사 실정보고 기 승인사항 반영(설비부-4760호, ’21.04.12.)

‧ 전력‧통신 접지설비 접지방식 변경

- 공사 시행 중 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」등 주휴수당 지급 관련 규정이 마련되어 공사비에 반영

○ 설계변경 내용

- 주요 변경내용

구 분	변경내용	비 고
총 차	‣ 피뢰 및 접지설비 물량 변경 - 천공 6(set) → 0(set), PERMOST접지봉 6(개) → 8(개)	실정보고 승인사항
	‣ 원가계산서에 미반영된 주휴수당 및 전자인력 관리단말기 비용 반영
1 차	‣ 피뢰 및 접지설비 물량 변경 - 천공 6(set) → 0(set), PERMOST접지봉 6(개) → 8(개)	실정보고 승인사항
	‣ 전력인입 및 전력간선 설비 물량 내역 조정 - 전선관 등 1차물량 반영 당초 24% → 변경 0%(총차물량 변경없음)

- 도급비 변경내역

‧ 총차

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
직 접 비	0101. 전기 설비공사
	010103. 피뢰 및 접지 설비공사	**********	**********	*************
	기타 공사	***********	***********	*
	소 계	***********	***********	*************
간 접 비		***********	***********	*************
고용개선지원비		*	**********	*************	주휴수당
공 사 원 가		***********	***********	*************
부 가 가 치 세		**********	**********	*************
총 계		***********	***********	*************

‧ 1차

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
직 접 비	0101. 전기 설비공사
	010101. 전력인입 및 전력간선 설비공사	**********	*	*************
	010103. 피뢰 및 접지 설비공사	**********	**********	*************
	소 계	**********	**********	*************
간 접 비		**********	**********	*************
공 사 원 가		**********	**********	*************
부 가 가 치 세		*********	*********	*************
총 계		***********	**********	*************

- 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
****	***********	***********	*************
****	***********	**********	*************

※ 계약기간 변경없음

○ 건설사업관리단 검토의견

- 한전 지중화공사 지연으로 전기공사에서 시공가능한 부분으로 시행하기 위해 1차 내역을 조정하여 2차 공사로 반영하는 것이 적정하다고 판단 됨

- 실정보고 승인사항에 대한 변경물량 및 주휴수당을 공사비에 적정하게 반영함

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단의 의견과 같이 공사비에 주휴수당 및 실정보고 승인사항을 반영하고 시공 가능한 부분으로 1차공사 내역 조정하는 것이 적정하다고 판단되어

○ 내역변경 후 2차공사를 조속히 발주하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.