문서번호	시설관리과-16462
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
정수용	이연창	08/27 유명은
협 조

『곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사』관련

양천·강서구 경계밸브 교체공사 사전검토 회의 결과보고

2021. 8

강서수도사업소

(시설관리과)

『곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사』관련

양천·강서구 경계밸브 교체공사 사전검토 회의 결과보고

우리사업소에서 시행하는「곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사」관련 구(양천·강서) 경계밸브 교체 및 무단수 차단 공사시행과 관련 공사 품질 및 안전 확보를 위한 사전 검토회의를 개최후 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치 : 강서구 화곡동 377-42번지 앞

○ 시설개요 : 2005/DCIP/D500, 제수밸브(B.F.V)

○ 시공업체 : 레드탑건설(주)

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트

○ 위치도

라인스토핑(D500)

밸브교체(D500)

양천/강서구 경계

□ 추진계획

○ 경계밸브 교체 및 무단수 차단 공법 추진

- 기    간 : ’21.8.28. ~ 8.29.(야간공사 1일)

- 공사내용 : 기존관 D500㎜ 무단수 차단 후 경계 제수밸브 D500㎜ 철거 및 설치

▸ 무단수 차단공법 시행 개요도

○ 작업순서 및 소요시간

작업계획	작 업 명	작업시간	비 고
작업준비	현장 도착 및 작업구간 확인	21:00 ~ 21:30 (30분)
	안전시설물 설치 및 교통정리원 배치	21:30 ~ 22:00 (30분)
무단수 차단 시공 (라인스토핑)	터파기 및 무단수 차단	22:00 ~ 00:00 (120분)	1개 차로 통행 가능
밸브교체	터파기	23:00 ~ 01:00 (120분)
	밸브교체	01:00 ~ 03:00 (120분)
	되메우기 및 다짐	03:00 ~ 04:00 (60분)
현장정리 및 철수	물청소 및 현장정리	04:00 ~ 05:00 (60분)

□ 사전검토 회의개최

○ 회의개요

- 일  시 : ’21.8.27.(금) 10:00 ~ 11:00

- 위  치 : 강서수도사업소 시설관리과 사무실(4층)

- 참석자 : 사업소, 감리자, 시공사

· 사업소 : 시설관리과장 등 4명(이연창, 정수용, 윤원영)

· 감리자 : 건설사업관리기술자 1명

· 시공사 : 현장대리인 1명

○ 회의내용 및 결과

- 회의안건 : 양천·강서 구 경계밸브 교체 및 무단수 차단 공법 시행시 공사 및 교통 안전 확보를 위한 사전검토

- 회의결과

① 무단수 차단 안전관리 철저 지시(기존관 이탈사고 방지대책, 안전보강 등)

② 노후 밸브(D500㎜) 교체를 위한 밸브 조절 및 공사자재 등 준비 철저

(이음관, 이탈방지압륜 등 여유자재 확보)

③ 교통안전을 위한 교통안전시설 · 안내간판 등 준비철저 및 교통안내원 사전 교육 실시 등

□ 행정사항

○ 경계밸브 교체공사 주말 야간 시행에 따른 당직실 공사통보

○ 야간공사 시행에 따른 현장 참여직원 초과근무 인정 요청

붙임 : 양천·강서 구 경계밸브 무단수 차단 시행 보고 1부.  끝.