문서번호	시설관리과-15099
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
강철운	권영안	이준호	08/30 김정일
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

【삼천사 급수공사 외 불광동 간선배관 정비공사】

2021. 08.

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

1. 공사개요

❍ 공 사 명 : 삼천사 급수공사 외 불광동 간선배관 정비공사

❍ 공사개요 : D = 50 ~ 150mm, L=1,137m

❍ 공사기간 : 2021. 04. 21. ~ 2021. 09. 12.

❍ 계약금액 : *************

❍ 도 급 자 : ****************

❍ 발 주 청 : 서부수도사업소(시설관리과과)

❍ 건설사업관리자 : ***(시설관리공단 공사감독2처)

2. 심의내용

❍ 설계변경 사유 및 변경내용

1) 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	관련근거
1회	********** *******	****************** *************	*******************************
2회	************	**********************************	*******************************
3회	**** **********	***********************************	******************************
4회	***** *******	********************************

2) 예정물량의 증․감 및 신규공종에 따른 설계변경

- 관부설 및 제수밸브실 설치 증·감내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증․감
배급수관 부설	D=13~50mm	m	***	***	*****
	D=80~150mm	m	***	***	*****
제수밸브실 설치	D=80~200mm	개소	*	*	*

3) 제경비 등 실 사용 정산에 의한 변경

연번	구 분	주요 변경내용	관련근거
1	4대보험료 정산 등	- 건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제비 정산 - 하도급발급수수료, 건설기계대여금 정산
2	산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산	- 실 사용 산업안전보건관리비와 제비율 적용 금액 중 적은금액 적용 - 환경보전비 정산

❍ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	공급가액	***********	***********	*************
	부가가치세	**********	**********	*************
	계	***********	***********	*************

구 분	당 초	변 경	증․감
합 계	***********	***********	*************
토 공	**********	**********	*************
부설공	**********	**********	*************
구조물공	*********	**********	*************
부대공	**********	**********	*************
사급자재대	**********	**********	*************
제경비	**********	**********	*************

3. 설계변경심의 결과

❍ 일   시 : 2021년 08월 25일(수) 10:00

❍ 장   소 : 시설관리과

❍ 위원회구성

- 위원장 시설관리과장

- 위  원 ******************************

❍ 심의의견 : 설계변경 적정함.

4. 조치계획

❍ 자체 심의한 결과 본 공사의 시공물량 증·감 및 제비율 등 설계변경 사유가 타당하여 원안대로 가결됨에 따라 계약상대자와 합의한 후 변경계약의뢰를 행정지원과에 의뢰하고자 하며,

❍ 서울시설공단에 설계변경 심의 결과를 회신하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의 결과서 및 심의요약서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 검토보고(공단) 1부.  끝.