문서번호	시설관리과-15119
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	代조광희	08/30 이태형
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 8.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 서울시설공단으로부터 현장실정보고서(2구간 다용도밸브 추가설치)가 제출되어 검토결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 현장실정 보고서 제출 *********************************

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

○ 2구간(D=100mm L=221m)은 대부분 음식점 및 상가로 이루어져 있어 단수 민원을 최소화하기 위해 가설급수장치를 설치하고자 하였으나, 가설급수장치를 연결해야할 기존관이 간선도로상에 위치하고 있어 설치가 불가능한 실정임.

2구간 단수 예정구간

○ 배급수간 정비공사 시점부에 다용도밸브를 추가 설치하여 가설급수장치를 설치 할 수 있도록 조치하고자 함.

○ 계략공사비 : 증)920천원

다용도밸브 설치( D=100mm)

(다용도설치 후 단수 없음)

□ 검토결과

○ 서울시설공단에서 제출한 현장실정보고(2구간 다용도밸브 추가설치)에 대하여 검토한 결과 상기 보고내용과 같이 적정하므로 승인 통보하고 추후 설계변경시 정산하여 반영코자 합니다.

2021.  08.

보고자 : 지방시설주사  조 광 희

붙임  현장실정 검토보고 1부.  끝.