문서번호	급수운영과-12537
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이승우		08/30 최춘근
협조

공사 실정 보고 사항에 대한 검토 보고

(2021년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)-3차

2021. 08.

강남수도사업소(급수운영과)

공사 실정 보고 사항에 대한 검토 보고(3차)

**************************

“************************”와 관련하여 ******************************************.

※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-10215호(‘21.8.24)

공사개요

*******************************************

****************************************

************************************

********************************

********************************

************************************

보고내용 및 검토의견

가. 현황 및 문제점

□ 관로부설 변경반영(지하매설물 접촉 지장)4~5구간

- 역삼동 702-13번지앞 도로외 1개소 관로부설 위치가 시험굴착 결과와 같이 저촉지장물(하수, 한전박스, 통신) 등이 많아 하월 및 우회하여 신설관 부설하여야 한는 실정임.

나. 검토의견

□ 상기 공사구간중 구간4~5은 지하매설물 저촉되는 맨홀(한전,통신)을 하월 및 우회하여 관부설이 가능할 것으로 판단됨.

**************

*****************************

*****************************

****************************

************************

다. 위치도 및 현황사진

지하매설물 위치도(하수박스, 한전, 체신맨홀 등)
4구간 지하매설물 우회(하수박스, 한전박스)	5구간 지하매설물 하월(하수박스, 한전박스, 통신)

조치계획

□ 상기 검토 내용을 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보 하여 시공 및 설계변경에 만전을 기하도록 조치코자 합니다.

붙 임: 1. 관련 공문 1부

2. 공단 실정 보고서 관련서류 1부.  끝.