더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2021년 산사태 예방공사 설계변경 시행

공원녹지과-17362(2021.08.27.)호와 관련하여, 2021년 산사태 예방공사의 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 산사태 예방공사

2. 공사기간: 2021. 4. 23. ~ 8. 31.

3. 공사내용: 계류정비, 낙석방지책 설치 등

4. 도 급 비: 금245,564,000원(금이억사천오백오십육만사천원)

5. 도 급 자: 조은숲(주) 대표 박경숙

6. 변경사유: 민원사항 및 현장여건에 따른 공법, 물량 등 변경

7. 변경금액

(단위:원)

구분	당초	변경	증․감	비고
도급비	245,564,000	270,961,000	25,397,000

8. 예산과목: 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내 사면 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 및 변경 사유서 각 1부.

2. 변경내역서 및 검증확인서 각 1부.

3. 일상감사 결과 1부.  끝.

주무관	양재명		생태농업담당	박고운		공원녹지과장	김경욱		도시관리국장	08/30 이창구
협조자	계약담당	신정경		재무과장	고영진
시행	공원녹지과-17447	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 156 (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3692	/전송	02-2241-6565	/	yjm29@sb.go.kr	/	부분공개(5)