문서번호	광화문광장추진단-10732
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	광장계획팀장	광화문광장사업반장	광화문광장추진단장		도시재생실장
진철웅	이강수	임창수	강옥현		09/19 강맹훈
협 조

준공기한 연기 보고

- 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역 -

2019. 9.

도시재생실

(광화문광장추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역」

준 공 기 한  연 기  보 고

□ 용역개요

○ 용 역 명 :「새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계」용역

○ 용역기간 : 2019.3.22.~2020.1.22.(10개월)

※ 1차 : ’19. 3.22.~9.21.(6개월) / 2차 : ’19.9.22.~’20.1.22.(4개월)

○ 사업규모 : 광장‧보도 6.6만㎡, 도로 정비(세종로 910m, 사직로 435m)

○ 설 계 비 : 2,764백만원(차수계약 : 1차 1,500백만원)

○ 과업내용

- 조경, 토목, 건축 등 시설계획, 경관계획 등 실시설계, 설계도서 작성 등

- 세종로, 사직로 교통소통대책 및 공사중 교통처리계획, 규제심의 등

- 휴게·편의시설, 안내시스템, 가로시설물 등 공공시설물 통합 디자인 가이드라인 마련

○ 용 역 사 : ㈜CA조경기술사사무소, ㈜유신, ㈜선인터라인건축사사무소

□ 추진경위

○ `19. 3.22.	기본 및 실시설계 용역 착수

○ `19. 8.~9.	설계경제성(VE) 심사(1~4차 회의, '19.9.3.완료)

□ 준공기한 연기

○ 변경내용 (증151일)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 차	'19.3.22.~'20.1.22.(307일)	'19.3.22.~'20.6.22.(458일)	증 151일
1 차	'19.3.22.~'19.9.21.(184일)	'19.3.22.~'19.11.25.(249일)	증 65일
2 차	'19.9.22.~'20.1.22.(123일)	'19.11.26.~'20.6.22.(209일)	증 86일

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 시민소통, 공감대 형성 등을 위한 추가 절차 이행으로 준공기한 연기

- 시민소통, 공감대 부족 등의 지적에 따른 추가 절차 이행으로 기본 및 실시설계 기간 연장 필요

□ 향후계획

○ `19.09. : 용역 준공기한 연기의뢰(광화문광장추진단→ 재무과)

○ `20.06. : 용역준공

붙임  합의각서(안) 1부. 끝.