문서번호	도시계획과-10463
결재일자	2020.8.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	종합계획팀장	도시계획과장
박지수	심재욱	08/04 조남준

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.6월)

2020. 7.

도시계획국

(도시계획과)

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.7월)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 UPIS 및 도시계획포털 유지관리 용역

○ 용역기간 : 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.

○ 용 역 비 : **********

○ 용 역 사 : 주식회사 텔루스

○ 과업대상

구 분	시스템명	세부내용
응용 프로그램	도시계획 정보시스템	○ 도시계획입안·결정시스템 ○ 도시계획 인트라넷 ○ 3D 의사결정지원시스템 ○ 과밀부담금관리시스템
	도시계획포털	○ 도시계획포털(웹사이트)
소프트웨어	상용S/W	○ 웹서버 1식 (JEUS & WebToB) ○ 지도엔진 1식 (ArcGIS Server)

○ 과업내용

- 입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

- UPIS DB현행화(도시관리계획 입안·결정도면 편집 및 탑재) 및 유지보수

- 도시계획정보 베이스맵 DB갱신(연속지적도, 건물, 수치지형도 등)

- 시스템 운영 및 유지관리

- 상용 소스트웨어 유지관리(웹서버, GIS엔진)

- UPIS 입력대상 고시자료 모니터링 업무지원

- 헬프데스크 운영 및 지원

□ 주요추진내용

□ 입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

○ 추진개요 : KRAS기준 주제도 누락 및 중복, 선형 불일치 등 오류사항 보완

○ 추진기간 : 2020.01 ~ 2020.07

○ 추진대상 : 용도지역, 용도지구, 개발제한구역

○ 추진절차

누락/중복/상이지역 대상 추출		추출지역 KRAS<>UPIS 선형 검토		시스템 내 DB 현행화
‘20.1 ~ 2.		‘20.2. ~ 6.		‘20.7.

○ 검토대상

- 주제도(용도지역/용도지구/개발제한구역)별 누락사항, 중복사항, 선형의 상이 여부

○ 추진내용

구분	대상지 추출(건)			검토대상(건)			현행화
세부사항	누락	중복	상이	누락	중복	상이	누락	중복	상이
1. 용도지역	7,609	3,361	139	580	1,032	139	580	1,032	294 (+155)
2. 용도지구	-	154	-	-	중복가능	-	-	-	-
3. 개발제한구역	-	-	4	-	-	4	-	-	4

○ 추진내용

구분/월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
1. 용도지역	UPIS & KRAS 자료 수집	CODE분류 & 누락 및 중복 대상지 추출		누락 대상 검토	누락사항 현행화	중복 및 상이 대상 검토 & 현행화
2. 용도지구		-	CODE분류 & 중복 대상지 추출	상이 대상 검토 & 중복사항 예외(가능)		상이 대상 현행화
3. 개발제한구역	※개발제한구역 정합성 추가 요청사항			공간정보포털 자료 수집	상이대상검토 & 현행화	-
4. 고도화 DB반영								현행화 반영

□ 데이터 현행화

구분

접수 및 처리내용

처리결과

향후계획

자료

○ 연속지적도 갱신 (월별)

○ 건물/기타지역지구/KRAS 용도지역/타법 갱신 (분기)

정상처리

○ 연속지적도 갱신 (월별)

고시

도면

○ 요청대상

고시목록 관리기준일	요청건수	관리대상 (고시 / 조서)	비관리
‘19.10.01~’20.09.30	413건	413건 / 1,403건	8건
‘19.10.01 이전	6건	6건 / 6건	-

○ 처리현황

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	미처리
‘19.10.01~’20.09.30	413건	230건	58건	117건

○ 2020.7월 현행화 실적

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	비관리
‘20.07.01~’20.07.31	14건	8건	6건	0건

※ 19년도 7월 실적(39건) 대비 36%

□ 업무지원

구 분	접수 및 처리내용	처리결과
운영지원	[ 도시계획포털 ] ○ 도시계획포털사이트 개편으로 인한 내용 공지 - 도시계획정보시스템 C/S(구)버전 운영 종료 및 통합DB서버(구) 운영 중단에 대한 사유 개제 - 안내문구 팝업창 공지 ○ 알림서비스(이메일) 생성기 – 사무실 주소변경 - 2청사 현재 주소로 주소 변경 ○ 도시재정비위원회 명단 반영 ○ 도시계획위원회 명단 반영 ○ 고도화 시스템 전환으로 도메인명이 변경 7월31까지 현 시스템의 도메인 명을 IP로 변경하여 서비스 가능하게 처리함(web서버) [ 입안결정시스템 ] ○ 고시자료 입안자료 등록 오류 복구 처리 - 업무 진행 중인 고시자료 담당자 완료 처리로 인한 자료 삭제 건 고시정보 복구 ○ 도시계획정보시스템 C/S(구)버전 7/22(수) 운영 종료에 대한 공지추가 - 시스템 종료 이전 게시판 공지사항 개제 - 사용자 접근권한 제외 작업(USER 정보 권한 > 조회권한으로 변경) ○ 고시자료 파일업로드 시 에러 발생 조치 - 서버용량 가득차서 파일업로드 에러 발생 - 데이터센터에서 서러 용량 증설 ○ 정비사업 관련 자료제공 검토 - 주제도 자료 제공 및 건수 확인 ○ DB통합 서버 자료 이관 백업 - 갱신/비 갱신 대상(공간정보(SHP)) ○ 도집 내 생활권계획 중심지 도형 누락 보완 - 중심지 내 매헌지구 도형자료 추가 ○ 개발제한구역 내 지번 내역 추출 ○ 데이터 센터 자료 이관 용량 확인 ○ 업무평가통계 추출 제공 ○ 서초구청 CS 사용자 명단 추출 제공 ○ DB통합 서버 자료 이관 시작 - 공간정보(SHP) Arc카탈로그 사용 로딩 (62번 서버로 자료 이관)	16건
사용자 지원	○ UPIS 프로그램 설치 지원, 오류처리, 사용법 문의 등	18건
기타지원	○ 데이터 센터 자료 이관 완료(속성테이블) - 7/23일 오전 기준 ○ LURIS 고시통합 관련하여 “전국_고시정비” 에 대한 정보 추출 제공 ○ LURIS 제출용 파일보관 정보 추출 ○ 프론트 오피스, 백오피스 관리대상 변경으로 인한 접속정보 제공받음	4건
월별 정기점검	○ H/W, S/W 시스템 운영 점검(내부 점검 시행)	1건

□ 시스템 정기점검

○ 서버 점검

서버명	성능	네트워크 상태	디스크 상태	소프트 웨어	에러
Web Application Server
Web Server 1	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 2	양호	양호	양호	정상	없음

○ 응용SW 점검

서버명	대상기능	점검결과		비 고
		정상	비정상
도시계획정보시스템	18개	18개	-
3D의사결정지원시스템	9개	9개	-
도시계획인트라넷	8개	8개	-
도시계획포털	15개	15개	-

○ 상용SW 점검

구분	상용SW	점검내용	점검결과
지도엔진	ArcGiS 9.3.1	예방점검 (서비스·DB연계 상태 및 로그)	양호
WAS	JEUS 6.0.0.7 standard		양호
	WebToB 4.1.1.0 BASE_Standard		양호

□ 시스템 장애처리

○ 장애처리 요청 내역

합계	응용프로그램	웹서버	DB	서버	기타
-	-	-	-	-	-

○ 장애처리 요청 내역 상세

구분	일 시	장애원인&내용	조치사항	조치결과
-	-	-	-	-

□ 유지보수인력 근무상황

성 명	근무내용	근무대상	근무일	비근무일	비고
조 혜 정	시스템 운영 지원	23일	23일	-
김 선 화	데이터 현행화	23일	22일	1일	휴가

□ 기타사항

○ 동작구 도시계획 시설 틀린 부분 수정 요청 건 내용 확인

- 도시계획 시설 삭제 및 선형 보완 작업내용 확인(8월 작업 진행 예정)

□ 차월 추진계획

구 분	8월 추진계획
UPIS	○ 도시계획정보시스템 데이터백업서버 자료 이관 최종 진행 - 속성자료, 도형자료 - MXD 파일 신규 서버 자료이관 DB연결 ○ 동대문구 도시계획시설 수정 보완자료 반영 - 도시계획시설 선형 삭제, 변경 작업 ○ 재해취약성 관련 추가 개발 건 작업 준비 및 개발 시작 - 일정계획 작성 - 개발공정 확인 ※ 고도화 사업단 개발지원 및 프로젝트 인수인계 예정(8월 초)
월별 정기점검 (시스템)	○ H/W, S/W 시스템 운영 점검(내부 점검 시행)

붙임  유지관리내역 1부.  끝.