문서번호	토목부-18841
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	09/28 김용제
협조

소화전 맨홀 디자인덮개 변경 외 1건 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

소화전 맨홀 디자인덮개 변경 외 1건 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(소화전 맨홀 디자인덮개 변경 외 1건)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

********************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-255호(2020.09.22.): 실정보고서 제출(소화전 맨홀 디자인덮개 설치건)

□ 창덕궁감2020-256호(2020.09.22.): 실정보고서 제출(하수관로 CCTV 조사비 반영건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.10.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 관련법규 의거 종로소방서 요청에 따라 소화전 맨홀뚜껑 변경 필요

○ 소방기본법시행규칙 제6조제1항에(소방용수 표지) 의거(‘20.02.20.개정) 종로소방서에서 맨홀 디자인 덮개 변경을 요청함.

○ 관련규정에 충족 및 공사비가 비교적 저렴하고 유지관리에 우수한 주철 제작 에폭시 도장 제품으로 교체 시행

소화전 맨홀(디자인) 설치(당초)	소방서 요청(변경)

□ 예비준공검사 시 종로구청 지적사항을 반영 하수관로 CCTV조사 시행

○ 예비준공검사 합동점검(‘20.6.30) 시 종로구청(치수과)에서 하수관로 상태에 대한 조사를 요청함.

- 서순라길, 돈화문로10길 구간 이음부 및 연결관에 대한 CCTV조사 실시

○ 하수관로 내부 CCTV를 촬영하여 빗물받이 연결관 이음부 적정연결 여부 조사시행

□ 물량 및 공사비 증·감 현황

○ 물량 증·감 내용

***	***	**	***			**
			**	**	***
************	********	*	*	**	**
***********		*	*	***	***
**************		*	*	*	*

○ 신규단가 적용현황

구분	적용현황	비고
신규비목	○ 협의율(92.827%)적용 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 공사계약 일반조건 제7절 1. 나항 “계약상대자의 책임없는 사유”에 해당 ※협의율 = (100+85.654) ÷ 2 = 92.827%

○ 공사비 증감 현황

(단위 : 원)

****		****	****	***	**
* * *	****	*	**********	**********
	***	*	*********	*********
	*	*	**********	**********
*******		*	**********	**********

□ 책임건설사업관리기술인 검토의견

○ 종로소방서에서 소화전 맨홀을 소방기본법시행규칙(’20.2.20.개정)에 의거 기준에 부합하는 소방용수표지를 설치해 줄 것을 요청함.

○ 시인성 및 유지비용(교체비용) 고려 법규기준에 적합하도록 주철로 제작 후 에폭시 도장으로 시공함이 합리적이라고 판단됨.

○ 예비준공검사(2020년 6월 30일) 시행시 종로구청(치수과)에서 서순라길  및 돈화문로 10길에 대하여 CCTV조사 시행을 요청함.

○ 이를 설계에 반영 후 적정한 조사를 통하여 연결부의 적정성 파악 및 기타 문제점을 조사함이 합당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 소화전 맨홀뚜껑 변경과 하수관로 CCTV 조사를 시설물 유지관리기관의 요청에 의하여 시행하는 것으로 실정보고 내용이 적정하다고 판단되므로 승인하고자 하며,

□ 우선 도급자에게 시공하도록 하고, 추후 설계 변경 시 반영하여 정산처리하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 제출(소화전 맨홀 디자인덮개 설치전 ) 공문 1부.

2. 실정보고서 제출(하수관로 CCTV 조사비 반영건) 공문 1부.  끝.