문서번호	토목부-18840
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	09/28 김용제
협조

측구틈 복구 마감재 변경 외 2건 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

측구틈 복구마감재 변경 외 2건 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(측구틈 복구 마감재 변경 외 2건)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

******************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-251호(2020.09.22.): 실정보고서 제출(측구틈 복구마감재 변경 건)

□ 창덕궁감2020-252호(2020.09.22.): 실정보고서 제출(고원식 포장 및 험프식 포장변경건)

□ 창덕궁감2020-254호(2020.09.22.): 실정보고서 제출(보도주차장 진입부 포장변경 건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.10.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 아스콘 시공품질 등을 고려 측구틈 복구방법 변경(아스콘 표층 제외)

○ L형측구 타설 후 기존 포장 측구틈보수를 콘크리트(12cm)+표층아스콘 5Ccm로 반영되어 있으나,

○ 좁은 폭(14cm)에서 현장여건 상 아스콘포장의 품질 및 안정성 확보가 어려움으로 아스콘 포장을 제외하고 하층부 현장콘크리트 타설로 품질 및 안전성 확보 시행

****	****	****
***	*	*
****	****************	****************

□ 보차도경계석 높이 변경에 따른 고원식 및 험프식 포장두께 변경

○ 종로구청 요청으로 보차도경계석 높이가 축소 시공(당초20cm→변경5cm)됨에 따라 현장여건에 맞게 고원식 및 험프식 포장두께 변경 시행

*****	****	****	**
**** ****	*********	****
**** ****	*****	*****
**** *******	** **********	** ************
**	*********	******
***	*	*

□ 야간공사에 따른 보도주차장 진입부 판석포장 기층콘크리트 변경 시행

○ 당 현장의 보도판석 작업이 현장여건상 야간에 시행됨으로 야간작업 시 관급자재인 레미콘 수급이 어려운 상황임.

○ 보도주차장 진입부 판석포장의 기층콘크리트를 모바일믹서(기계)를 활용한 현장타설 콘크리트로 시공하여 품질 및 공정관리 확보

**		****	****	**
****** ****	**	***	****
	**	*****	*****
*****		*	*

※ 기층콘크리트의 품질 확보를 위해 모바일믹서 사용 시공(대가산정은 콘크리트믹서0.45m3적용)

□ 물량 및 공사비 증·감 현황

○ 물량 증·감 내용

***		***	**	***			**
				**	**	***
*************	******	*********	*	*****	*	******
	****** ********	*********	*	*	*****	*****
	*** ******	***	*	**	*	***
***************	******		*	****	****	*	****
	******		*	****	****	*	****
	****** ******	****	*	***	*	****
*********************	*******	********* ****	*	***	*	****
	*********	********** ****	*		***	***

○ 신규단가 적용현황

구 분	적용현황	비고
신규비목	○ 협의율(92.827%)적용 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 공사계약 일반조건 제7절 1. 나항 “계약상대자의 책임없는 사유”에 해당 ※협의율 = (100+85.654) ÷ 2 = 92.827%

○ 공사비 증감 현황

(단위 : 원)

***		***	***	***	**
* * *	****	***********	***********	***********
	***	********	********	**********
	*	***********	***********	***********
****		**********	**********	**********
****		***********	***********	*******

□ 책임건설사업관리기술인 검토의견

○ 측구틈 복구 마감재를 현장여건 및 품질확보를 위해 아스콘 표층를 제외하여 현장타설 콘크리트(5종)이 시행하는 것이 합당하며, 품질 및 공정관리에 적정함.

○ 종로구청 요청으로 보차도경계석 높이 변경(T200→T50)으로 인해 기존설계에 반영된 고원식 포장 및 험프식 포장의 형상도 현장에 맞게 변경되어야 함.

○ 보도 주차장 진입부 판석포장(Type-C)의 기층콘크리트가 레미콘이나, 야간작업에 따른 관급자재 수급 문제로 현장비빔으로 변경함이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		조 치 의 견

□ 측구틈 복구마감재 변경, 고원식 포장 및 험프식 포장 변경, 보도주차장 진입부 포장 변경에 대한 실정보고 내용이 적정하다고 판단되므로 승인하고자 하며,

□ 우선 도급자에게 시공하도록 하고, 추후 설계 변경 시 반영하여 정산하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 제출(측구틈 복구마감재 변경 건 ) 공문 1부.

2. 실정보고서 제출(고원식 포장 및 험프식 포장변경건) 공문 1부.

3. 실정보고서 제출(보도주차장 진입부 포장변경 건) 공문 1부.  끝.