문서번호	토목부-18981
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	09/29 김용제
협조

석재판석 포장구간 등 차선도색 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

석재판석 포장구간 등 차선도색 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(석재판석 포장구간 등 차선도색 변경건)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

***************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-260호(2020.09.28.): 실정보고서 제출(석재판석 포장구간 차선도색 변경 건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.10.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 경찰청 기준 및 종로구청 요청사항에 적합하게 차선도색 변경 시행

○ 차도판석부의 융착식 차선도색은 경찰청 기준에 부적합하고, 유지관리상에 문제가 있으므로 수용성 차선도색으로 변경 시공

- 융착식은 석재 혹은 벽돌포장, 콘크리트포장, 가포장 및 6개월 이내에 덧씌우기 등 재포장에 예정된 노면에는 적합하지 않음.(교통노면표시 설치·관리 매뉴얼, 경찰청, 2011년 12월 시행)

○ 돈화문로 차량통행의 원활성 확보를 위하여 중앙차선을 황색실선에서 황색파선으로 종로구청(교통관리과)에서 변경 요청(종로구 교통관리과-9759호, 2020.05.20.)

□ 물량 및 공사비 증·감 현황

○ 물량 증·감 내용

****	****	**	*****		***	**
			***	***
*** ****	*****	*	***	***	****
	*****	*	**	***	***
	*****	*	**	**	***
	*****	*	**	*	***
	*********	*	***	***	****
	******	*	***	***	***
*** ****	*****	*	*	**	***
	*****	*	*	*	**
	*********	*	*	**	***
	******	*	*	**	***

○ 신규단가 적용현황

구분	적용현황	비고
신규비목	○ 협의율(92.827%)적용 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 공사계약 일반조건 제7절 1. 나항 “계약상대자의 책임없는 사유”에 해당 ※협의율 = (100+85.654) ÷ 2 = 92.827%

○ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		***	***	***	**
* * *	****	***********	***********	*********
	***	**********	**********	*******
	*	***********	***********	*********
****		***********	***********	*********

□ 책임건설사업관리기술인 검토의견

○ 차도부 및 이면도로 접속부 판석설치 구간의 차선도색의 경우 내구성 확보 및 파손 최소화를 위하여 수용성 재료를 사용함이 합당해 보임(경찰청 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼, 2011년 12월)

○ 돈화문로의 종로구청에서 요청한 중앙선의 실선에서 파선으로의 변경은 시인성 및 교통량 등을 고려해 볼 때 합당하다고 사료됨. (종로구청 교통관리과-9759호, 2020.05.20.)

Ⅳ		조 치 의 견

□ 석재판석 포장구간 등 차선도색 변경 건에 대한 실정보고 내용이 적정하다고 판단되므로 승인하고자 하며,

□ 우선 도급자에게 시공하도록 하고, 추후 설계 변경 시 반영하여 정산하고자 함.

붙임: 실정보고서 제출(석재판석포장구간 차선도색 변경 건) 공문 1부.  끝.