문서번호	기술심사담당관-2145
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		설비심사팀장	기술심사담당관
조기성		안계훈	02/03 안대희
협 조
	기술관리팀장			정현중

은평 광역자원순환센터 건립사업 기본 및 실시설계 설계경제성(VE) 검토 실행계획

2021. 2.

기술심사담당관

(설비심사팀)

- 은평 광역자원순환센터 건립 기본 및 실시설계 -

설계경제성(VE) 검토 실행계획

「은평 광역자원순환센터 건립사업 기본 및 실시설계」에 대해 설계경제성검토 소위원회를 구성하고, 설계경제성(VE) 검토를 추진하고자 함

1		관련 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ '21년 설계경제성 검토 운영계획(행정부시장 방침 제6호, '21.1.14.)

□ 설계경제성 검토 요청(은평구 자원순환센터건립추진단-490, '21.1.30.)

2		사업 개요

□ 요청부서 : 은평구 자원순환센터건립추진단

□ 위    치 : 은평구 진관동 76-40번지 일원

****************************************************

*****************************************************

**********************************

*****************

3		운영협의회 협의결과

□ 운영협의회 검토회의 개요

○ 검토일시 : '21.2.2.(화) 14:00

○ 검토위원 : 기술심사담당관(위원장), 설비심사팀장(간사),

기술관리팀장, 토목심사팀장(위원)

○ 검토결과

-「건설기술진흥법 시행령」에 의거한 설계경제성(VE) 검토 대상사업(총공사비 100억원 이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 협의결과 :  기술심사담당관 위탁검토 시행

4		설계경제성(VE) 검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진방법 : 설계경제성 검토 소위원회 구성

○ 설계경제성 검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸ 위원장 안대희 기술심사담당관 ▸ 간 사 안계훈 설비심사팀장 ▸ 설계VE 담당 조기성 주무관	․설계경제성(VE) 검토 계획 ․회의 지원 등
리 더	▸ 최영민 리더 자람기술㈜	․워크숍 준비, 진행 ․결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 황현철 자람기술㈜	․워크숍 준비, 보조 ․결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	▸ (플 랜 트) 여두현 위원 ㈜대한콘설탄트 ▸ (플 랜 트) 오세영 위원 정연기술사사무소 ▸ (건축기계) 김영일 위원 서울과학기술대학교 ▸ (전기전력) 정찬웅 위원 동산엔지니어링 ▸ (건축계획) 김공숙 위원 ㈜토림종합건축사사무소 ▸ (건축구조) 송병석 위원 비에스파트너스	․기능 분석 ․기술 검토 ․아이디어 제안 및 평가 ․제안서 작성
발주부서	▸ 신동진 주무관 은평구 자원순환센터건립추진단	․사업설명, 제안서 검토
설계자	▸ 박정수 이사 벽산엔지니어링	․사업설명회 준비 ․제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
′21.2.8.(월) 10:00~16:00 (워크숍 1일차)	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석
′21.2.25.(목) 10:00~17:00 (워크숍 2일차)	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가
′21.3.4.(목) 10:00~17:00 (워크숍 3일차)	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가
'21.3.8.(월)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 은평구 자원순환센터건립추진단)
'21.3.12.(금)	- VE 제안 채택결과 회신 (은평구 자원순환센터건립추진단 ⇒ 기술심사담당관)
'21.3.19.(금)	- 설계경제성(VE) 검토 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 은평구 자원순환센터건립추진단)

5		행정사항

*********************************

*********************

**********************************************

**************************************************

*******************************************

************************************************************

**********************

○ 지급부서┍ 위원수당 : 요청부서(은평구 자원순환센터건립추진단)

┕ 회의운영비 : 기술심사담당관

□ 향후 추진계획

○ 설계경제성(VE) 검토 결과 통보('21. 3월 중)

붙 임 : 설계경제성(VE) 검토 요청서 1부.  끝.