문서번호	시설보수과-7510
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
송진수		임준빈	08/31 최규동
협조

『2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

작업지시(제7차) 변경 보고

2021. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

작업지시(7차) 변경보고

우리센터에서 시행하고 있는 차집관로 준설공사와 관련하여 센터 내 3, 4처리장 최초침전지 및 유입동 침사지 준설공사 추진에 따른 변경계획 보고임.

[관련근거 : 시설보수과-7423호(2021.8.27.)에 대한 소장님 변경지시사항임]

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 개    요 : 준설 5,630㎥, 준설토 운반 및 적치, 기타 부대공사 등

○ 기    간 : 2021.03.12. ~ 2021.12.27.

○ 계약금액 : ********

○ 계약업체 : ********************

Ⅱ		준설토 조사현황 및 준설토 처리방안

○ 조사현황

- 조사기간 : 2021. 07. 01. ~ 08. 26.

- 조사대상 : 유입동 침사지(15지) 및 1차 침전지(80지)

○ 조사결과

- 3, 4처리장내 최초침전지 및 유입동 침사지에 스컴 및 준설토가 다량으로 퇴적되어 센터 기계시설물 유지관리 및 수처리 운영에 영향을 주고 있어 준설이 시급한 실정임.

구 분	위 치	규격	추정량	준설방법	비 고
계			3,840㎥
1	유입동 침사지	3처리장 침사지(12지) 4처리장 침사지(3지)	1,500㎥	흡입준설, 인력준설 등	운영과 요청 및 소장님 지시사항 총 5개지
2	3, 4처리장 초침(1차침전지)	A계열~E계열 계열 당 16지	2,340㎥	흡입준설, 인력준설 등	운영과 요청 및 소장님 지시사항 총 26개지

○ 준설토 처리

- 센터 내 운반 야적하여 수분 제거 후 운반 및 처리용역을 통해 반출

○ 1차침전지 스컴 처리

- 스컴은 센터내 유입동방향 차집관로에 반입하여 처리

- 스컴은 관내 처리하기 때문에 작업시간, 작업차량, 작업인부등을 감안하여 처리비용을 산출지급

Ⅲ		준설토 처리에 따른 예산확보방안

○ 소요예산 : 226백만원

사 업 명	계약금액 및 물량				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
차집관로 준설공사	******** ********	******** ********	***	****** ********
준설토 운반 및 처리용역	****** ********	****** ********	***	***** ********

○ 예산확보방안

- 2021년도 공통유지보수비(토목분야) 예산의 낙찰차액 및 예산잔액 사용

- 사업별 낙찰차액 및 예산잔액 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	배정예산	예산잔액	낙찰차액	사용가능액	비 고
계	*****	**	***	***
차집관로 준설공사	*****	**	***	***
준설토 운반 및 처리용역	*****	**	****	***

○ 준설공사 및 운반처리용역 예산집행 현황 (′21.8.30.현재)

(단위 : 백만원)

사 업 명	계약금액	기성금 집행액	집행잔액	추가 소요예산	비 고
계	*	*	*	***
차집관로 준설공사	*****	***	***	***
준설토 운반 및 처리용역	*****	*	***	***	공정 : 60%

Ⅳ		조 치 의 견

○ 우리센터와 계약체결한 2021년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)업체에 변경 작업지시하여 조속히 시행코자 하며, 시공물량 증감에 대하여는 추후 실 시공물량으로 정산하여 설계변경 시행

○ 또한 금회 작업지시로 인하여 계약금액이 소진될 예정으로 작업지시(7차)를 완료하여 사업을 준공처리

○ 하반기 추가 준설량에 대해서는 공통유지보수(토목분야) 집행잔액, 낙찰차액 등을 활용하여 추가 발주 추진******************

붙임  1. 제7차 작업지시(변경) 1부.

2. 준설물량조사 현황 1부.

3. 작업요청공문(운영과) 1부.  끝.