문서번호	시설과-4226
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
권정수		代김현태	08/31 박종수
협조

『서울숲 CCTV  정비공사(2단계)』

준공기한 연기 검토 보고

2021. 8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『서울숲 CCTV 정비공사(2단계)』

준공기한 연기 검토 보고

서울숲 CCTV 정비공사(2단계)와 관련하여 준공기한 연기 검토 보고 드림.

□ 공사 개요

❍ 공 사 명: 서울숲 CCTV 정비공사(2단계)

❍ 위    치: 성동구 뚝섬로 273(서울숲)

❍ 사업내용: 서울숲 CCTV 정비사업(2단계) 도급공사

-*****************

-*****************

❍ 공사기간: 2021. 6. 10.~2021. 9. 2.

❍ 계약금액: ************

❍ 업 체 명: *****************

□ 준공기한 연기검토

❍ 검토사유 : 준공기한 연기

❍ 연기사유

-*********************************

❍ 준공기한 변경

-당 초 : 2021. 06. 10. ~ 2021. 09. 02.

-변 경 : 2021. 06. 10. ~ 2021. 09. 15.(13일 연장)

❍ 지체상금 부과 검토

-지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치계획

❍ 계약부서에 변경계약(준공기한 연장계약)요청.  끝.