문서번호	총무과-22807
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
조윤현		전재현	08/31 김혁
협조

「서소문청사 4개부서」

환경개선관련 통신공사 계획

2021. 8.

총 무 과

(별관운영팀)

「서소문청사 4개부서」

환경개선관련 통신공사 계획

서소문청사 1동 택시정책과 등 4개부서 사무실 환경개선에 따른 통신회선 및 TV 등 관련 통신시설 설치를 위한 통신공사를 실시하고자 함

1		관련근거

❍「청사업무 공간 확충 및 사무환경개선 등 추진계획」(총무과-13921, ‘21.5.27)

2		공사개요

❍ 공사기간 : ’21.9.3 ~ 9.26.

❍ 대상부서 : 서소문청사 1동 4개부서

- 택시정책과, 버스정책과(7층), 정보시스템담당관, 공간정보담당관(3층)

❍ 공사내용 : 택시정책과 등 사무실 환경개선에 따른 통신공사

❍ 공사절차

통신케이블 포설	케이블 및 몰드 설치	행정전화기 설치	TV설치

3		추진일정

<택시정책과, 버스정책과> : 서소문청사 1동 7층

❍ ’21.8.25 ~ 9.3 : 부서 환경 개선 실시

※ 임시 사무실 통신공사 완료 : ‘21.8.25

❍ ’21.9.4. ~ 9.5 : 부서 통신공사 실시

- 통신회선 및 행정전화 설치

- TV설치 및 출입태그 설치 등

- 전화상태 시험 및 최종 통신 상태 확인

<정보시스템담당관, 공간정보담당관> : 서소문청사 1동 3층

❍ ’21.9.13 ~ 9.24 : 부서 환경 개선 실시

※ 임시 사무실 통신공사 : ’21.9.6 ~ 9.10

❍ ’21.9.25. ~ 9.26 : 부서 통신공사 실시

- 통신회선 및 행정전화 설치

- TV설치 및 출입태그 설치 등

- 전화상태 시험 및 최종 통신 상태 확인

4		소요예산 및 계약방법

❍ ***************

※ ******************************************

❍ ***********

-*******************************

5		행정사항

❍ 통신공사 전문업체와 수의계약 실시(재무과 계약 의뢰)