문서번호	토목부-16643
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
박희정	김동현	임춘근	김홍길		08/31 이정화
협 조	토목총괄과장			진재섭
	토목설계과장			한병찬
	주무관			김종혁

「국제교류복합지구 도로개선사업」

우선시공분 추진계획

2021. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「국제교류복합지구 도로개선사업」

우선시공분 추진계획

국제교류복합지구 및 주변지역 일대 도로체계를 개선하여 장래 여건에 대응하고 사람중심의 이용환경 조성을 위해 시행중인『국제교류복합지구 도로개선사업』에 대한 공공기여 협약일정 준수를 위해 우선시공분 추진계획을 보고 드림.

1	추진근거

	▸ 도로개선사업 F/T(우선시공) 검토 (부시장님 현안보고, ‘20.11.03.) ▸ 기본설계 사업경과 보고(F/T 필요성 검토) (부시장님 보고, ‘20.12.06.) ▸ 국제교류복합지구 도로개선사업 우선시공분 변경 협의회신 (동남권사업과-407, ‘21.07.30.) ▸ 국제교류복합지구 도로개선사업 우선시공분 변경 통보 (도로계획과-10638, ‘21.08.09.)

2	사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 강남구, 송파구 일원

(올림픽대로 영동대교 ~ 신천나들목, 탄천동로, 동부간선도로)

○ 사업내용

- 보행중심 도로체계 구축(올림픽대로/탄천동로 지하화, 삼성교 및 봉은교 보행로 확장)

- 도로 연결체계 정비(동부간선도로 및 영동대로 남단램프 신설․이전)

- 나들목 및 도로구조 개선(올림픽대로 선형개선, 탄천/신천 나들목 개선)

○ 용역기간 : '20. 03. 16. ∼ '21. 12. 05.

○ 총사업비 : 6,159억원 (설계비 111억원)

○ 참 여 사 / 계약금액                               (단위 : 천원)

구 분	1공구	2공구	3공구	4공구
참여사	㈜경동엔지니어링 컨소시움	㈜태조엔지니어링 컨소시움	㈜동해종합기술공사 컨소시움	㈜제일엔지니어링 컨소시움
계약금액	2,594,251	2,614,950	3,225,000	2,661,700

○ 설계감리 : ㈜진우엔지니어링코리아외 1개사

3	추진경위

○  ‘20.03.16.      : 기본 및 실시설계 착수

○  ‘20.04.10       : 착수보고(동남권사업과, 강남구, 송파구)

○  ‘21.02.08.~    : 기본설계 건설기술 심의(조건부 채택)

○  ‘21.02.19.~    : 실시설계 요청(도로계획과→도기본)

○  ‘21.03.30.      : 잠실스포츠,MICE복합공간 조성관련

민간투자사업 시설배치 재검토계획(행정1부시장 방침)

- ****************************************************************

○  ‘21.04.22.      : 도로개선 지구단위계획 교통영향평가 회의(동남권사업과)

- 동부간선도로 진입램프 신설 제외, 탄천서로 사람숲길 제외(일반 차도로 복원)

○  ‘21.06.17.      : 제3자 제안공고(잠실스포츠,MICE복합공간 조성관련 민간투자사업)

○  ‘21.06.29.      : 실시설계 자문회의

○  ‘21.08.06.      : 특정제품(기술) 선정 심의(우선시공분)

3	사업추진방법

□ 사업추진체계

안전총괄실(도로계획과)		도시기반시설본부		지역발전본부(동남권사업과)
∙기본설계 ∙관련 행정절차 이행 ∙市 도로정책 및 도로체계와 정합성 검토	+	∙실시설계 ∙관련 행정절차 이행 ∙공사 관리·감독 - 건설사업관리용역 시행	+	∙사업추진 총괄 - 계획변경 - 일정관리 - 재원확보 ∙관련계획과 정합성 검토

□ 사업시행자 : ㈜현대건설

□ 재원확보 : 현대차 GBC 공공기여금

□ 건설사업관리용역 추진방법

○ 용역발주 공구 분할

- 노선축, 공간·지리적 위치, 공사간 간섭여건 등을 감안 적정공구 분할필요

- 교통단절 없는 우회도로 기능확보 및 공사 우선순위 고려

○ 공구 분할 검토(안)

구분	건설사업관리 1공구	건설사업관리 2공구
사업개요	￭ 올림픽대로 지하화 ∙ 폭 43.5m(10차로), 연장 0.98km(지하차도 540m) ￭ 올림픽대로 청담1·2교 주변 선형개선 ∙ 폭 40.0m(8~11차로), 연장 1.38km (청담1교 521m,청담2교 490m) ￭ 신천나들목 개선 ∙ 폭 19.5m(4차로), 통로암거 60m (올림픽대로 하부 2차로⇒4차로) ￭ 올림픽대로(하남) 진입램프 개선 ∙ 폭 5.5m(1차로), 연장 0.1km(진입램프교 60m)	￭ *************** ∙ ********************** ￭ **************** ∙ *********************************************** ∙ (김포방향) 폭 6.4m(1차로), 연장 531m(교량 418m) ∙ (올림픽대로진입) 폭 6.4m(1차로), 연장 809m ￭ 탄천동로 지하화 및 탄천나들목 개선 ∙ 폭 21.0m(4차로), 연장 0.72km(지하차도 720m) ￭ 영동대교 남단 진입램프 신설 ∙ 폭 6.4m(1차로), 연장 740m(교량 250m) ￭ 기타(봉은사로113/114길 정비 등)
감리 기간	****	****
설계 공구	1공구, 2공구	3공구, 4공구
공사비	****************	****************
감리비	*********	********

※ 감리비는 추후 실시설계 확정 및 인정가액 반영하여 설계변경 시행

○ 발주방법 검토

구분	동시 발주(1·2공구)	분리 발주(2공구 발주후 1공구 발주)
특징	￭ 야구장 이전확정시까지 실시설계 지연에 따라 1공구 계약 및 착수계 제출후 장기간 과업중지 및 설계변경사유 발생 ￭ 동시발주로 인한 입찰참여업체 21년 실적 성과기대	￭ 2공구 우선시공에 따른 감리 조기발주 필요 ￭ 2공구 감리 우선시공분은 야구장 이전이 미치는 영향이 경미하여 설계변경 변동폭이 적음 ￭ 입찰후 즉시 착수 가능 ￭ 입찰참여 기회 추가 부여
발주 시기	***********	*********************** ***********************(설계완료 후 발주)
추천안		○

4	우선시공분 시행 필요성

4-1	공공기여 이행 협약서 일정준수

○ 공공기여 이행협약기준 도로개선사업은 21년 10월 착공하도록 되어 있으나 야구장 이전 관련 기본설계 보완에 따라 설계일정 지연으로 착공 지연 우려

･ 협약서상 착공시기(‘21년10월) 준수를 위해 야구장 이전과 무관한 공종에 대해 우선시공 필요

4-2	도로개선사업 공기 증가

○ 도로개선사업 공사기간이 기본계획 수립당시 예상한 기간보다 현재 16개월 가량(48개월→64개월) 증가되어 우선시공시 공사기간 12개월 단축 효과

4-3	착공지연으로 인한 인정가액 증대 우려

○ 협약서(제7조 2항의 3)에 따라 민간사업자의 귀책사유가 아닌 사유로 착공이 지연될 경우 해당 기간만큼 물가변동분을 인정가액에 조정 반영토록 규정되어 착공시기 준수 필요 (인정가액 증가 우려에도 착공 가능한 공종 미착공시 책임소재 우려)

4-4	공정 개선 효과로 효율적인 공사 추진

○ 동부간선도로 진출연결로 및 삼성교 확장은 탄천동로 지하차도와 병행시공이 불가하고 순차적 시공을 통하여 통행량 분산/해소 등의 교통개선 효과 및 민원 요소 최소화

･ 탄천동로 지하차도 공사 선행조건인 봉은교 폐쇄는 동부간선도로 진출연결로 및 삼성교 확장공사가 선행되어야 공사 시행 가능

4-5	교통 개선 효과 증대

○ 삼성교 우선 확장시공을 통해 잠실방향 진출이 가능하고 동부간선도로 진출연결로를 통해 대치, 역삼방향 진출이 가능하므로 영동대로 구간 교통 분산효과가 큼

5	우선시공분 세부 추진계획

○ 우선시공분 사업개요(변경)

구 분	공 종	우선시공분 공사내용	추정공사비	비 고
당 초	올림픽대로 교통우회도로	신천나들목 이설, 공사용 가교 (L=1.6km, 가교 1개소 588m)	576억원
****	*** ******	*************** **********************	*****	*****
		***************** *********************	*****

○ 세부 추진 일정

- 2021. 9. : 지역수자원위원회 심의(하천관리과)

- 2021. 9. : 설계성과품(내역서, 도면, 시방서) 검토(현대건설)

- 2021. 9. : 소규모 환경영향평가 협의(한강유역환경청)

- 2021. 9. : 도로개선사업 건설사업관리용역 발주

- 2021. 9. : 소규모 재해영향평가, 교통소통대책 자문, 교통규제 심의

- 2021.10. : 성과품 보완 및 제출(도기본→도로계획과, 동남권사업과, 현대건설)

- 2021.11. : 하천점용 및 공사 실시계획 인가(市 하천관리과)

- 2021.11. : 우선시공분 착공

6	향후 추진계획

○ '21. 09. ~           : 건설기술용역 심의(사업수행능력평가기준 협의)

○ '21. 09. ~           : 계약심의위원회 심의

○ '21. 09. ~           : 건설사업관리용역 발주

○ '21. 11.               : 건설사업관리용역 계약 및 착수  끝.

붙임  : 공구분할 위치도  1부.  끝.