문서번호	기전과-7312
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이건용		석대창	08/31 차창훈
협조
	주무관		이정호

낙찰차액 사용 검토 보고

[도로시설물 노후 조명시설 개선]

2021. 8.

남부도로사업소

(기전과)

낙찰차액 사용 검토 보고

[도로시설물 노후 조명시설 개선]

노후 조명시설 개선 예산의 낙찰차액과 집행잔액 사용 계획을 수립, 예산 불용을 최소화하고 노후 기전시설물을 개선하고자 함

１

예산 집행 내역

❏ 2021.8.27. 까지 예산 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	예산재배정액	기원인행위액	집행(낙찰)잔액
도로시설물 노후 조명시설 개선	*******	*******	******

❍ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

❏ 예산 집행 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	예산재배정액	기원인행위액	집행(낙찰)잔액	비고
합 계	*******	*******	******
상도터널 조명개선	*******	*******	******
한강대교 가로등 개선	*******	*******	******
영등포역고가 가로등 개선	*******	******	*****
사평지하차도 가로등 개선	*******	*******	******
사당고가 가로등 개선		******	*******	집행잔액사용
동작대교 가로등 분전반 교체	******	******	*****
자재구매 (LED등, 수신기)		******	*******	집행잔액사용

2

낙찰잔액 사용 계획

❏ 선암지하차도 조명시설 개선공사 시행

❍ 선암지하차도 노후 조명시설 개선 공사 : 162,661천원

- 지하차도 노후 조명기구 교체 공사 : 경쟁계약

- LED등 조달구매 : 다수공급자계약

품명	규격	단위	수량	단가	금액
터널용등기구	LED 50W	SET	52	*******	**********
터널용등기구	LED 100W	SET	62	*******	**********
터널용등기구	LED 125W	SET	20	*******	*********
터널용등기구	LED 150W	SET	86	*******	**********
[소 계]		식	1		**********
	0.54%	식	1		*******
[총 계]					**********

❏ 예산 소요방법(*********)

❍ 낙찰잔액 사용: ********

❍ 추가 예산 재배정 :  *********

3

사업 추진 계획

❏ 전기공사 발주

❍ 공 사 명 : 선암지하차도 노후 조명시설 개선 공사

❍ 소요예산 : ************

❍ 공사기간 : 계약일로부터 30일

❍ 계약방법 : 경쟁계약

❍ 계약자격 : 주된 영업소가 「서울특별시」소재의 전기공사업 면허등록업체

❏ 관급자재 구매

❍ 건    명 : 선암지하차도 LED 터널용 등기구 구매

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자 계약)

- 소요예산 : ********************

- 구매내역 : 220등

4

추진 일정

❏ 2021.  8. 31. 추진 계획 수립

❏ 2021.  9.  1. 추가 예산재배정 요청

❏ 2021.  9. 13. 관급자재 발주

❏ 2021.  9. 27. 전기공사 발주

❏ 2021. 11.  5. 공사 준공

붙임 : 설계내역서. 1부.