문서번호	시설개선과-6466
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
진종구		윤정한	09/01 김정열
협 조

「2021년 전기설비유지보수공사(연간단가)」

설계변경 검토 보고

2021. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

설계변경 검토 보고

우리과에서 시행중인 「2021년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사」의 계약금액 소진과 향후 시설물 유지보수를 위해 설계변경을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명: 2021년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사

○ 공사기간: ‘21.02.10. ~ 12.31.

○ 공사내용: 잠실운동장 등 3개소 노후 전기설비 정비

○ 공사업체: 이창전력(주) 대표 이석용

○ 계약금액: *************

Ⅱ		추진현황

○ 작업지시 금액(계약금액 99.9% 소진, 잔액:214천원)

2021. 8.31.(단위:천원)

구 분 계	1차	2차	3차	4차	5차
357,064	68,717	68,805	116,402	52,019	51,121

○ 향후 소요예산(42백만원)

- 임대업소 전기설비 정비(10백만원)

- 기타 전기설비 보수(32백만원)

Ⅲ		설계변경 검토

○ 변경 필요성

- 전기설비 안전관리를 위해 지속적으로 정비공사를 시행하여 왔으나, 정비대상 노후시설물이 많아 지속적인 정비 필요함.

○ 계약금액

당초	변경	증·감
*************	*************	***************

○ 예산확보 방안: 시설비 집행잔액 활용

- 예산과목 : 노후체육시설 개보수 사업, 잠실종합운동장‧구의야구공원 시설개보수, 시설비(집행잔액 사용)

Ⅳ		검토의견

○ 전기설비의 안전한 관리와 주민편익 증진을 위하여 상기와 같이 설계변경 시행하여 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.