문서번호	급수운영과-14500
보존기간	년
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강은수	代김승완	09/01 이용구
협 조

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(독산동 배급수관-7구간 교통정리원 추가배치)

2021. 9. 1.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(독산동 배급수관-7구간 교통정리원 추가배치)

서울시설공단으로부터「독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사」에 대한 현장 실정보고서가 제출됨에 따라 검토 후 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 독산동 1071-2~1071-32번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : ’21. 6. 10. ~ ’21. 11. 17.

○ 도 급 액 : 금***********원

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,304m

○ 계약업체 : ************

○ 관련공문 : 공사감독2처-10456(2021. 8. 30.)호

□ 보고내용

○ 실정보고 내용

- 현황 및 문제점

․ 본 배급수관 정비공사 7구간(*********************************)은 간선도로 왕복 4차로 중 편도 2차로를 점용하여 야간 공사 진행 중이며, 중앙분리대가 있어 한 방향 통행을 차단하고, 교통흐름을 반대방향으로 교행 처리하여 공사를 진행해야 하는 현장실정임.

- 요청사항

․ 공사중 원활한 차량통행 및 안전확보를 위한 교통신호수를 추가하여 시공

※ 공사비 증액 약1,101천원(붙임 산출서 참조)

- 위치도 및 현장사진

*****************************************

○ 공단 검토의견

- 위와 같은 현황으로 시·종점 양쪽에 교통정리원을 추가 배치하여 원활한 차량 교행 및 안전한 주행차량 유도로 교통안전사고를 예방하는 것이 타당하다고 판단됨

□ 조치의견

○ 시설관리공단 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 시설관리공단에 승인 통보하여 공사 추진에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

붙임  실정보고 검토보고서 제출(7구간 교통정리원 추가배치) 1부.  끝.