문서번호	역사문화재과-3178
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	문화재사업팀장	역사문화재과장		문화본부장
정붓샘	정경란	권순기		02/17 유연식
협 조
	★시설국장		김홍길

사적 제558호 의정부지(議政府址)

유구 보호시설 설계 추진계획

2021. 2.

문 화 본 부

(역사문화재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

사적 제558호 의정부지(議政府址)

유구 보호시설 설계 추진계획

발굴조사 결과 확인된 의정부지 유구보호·관람시설 건립과 사적 정비 공사를 위한 기본·실시 설계 용역을 시행하여 의정부지 역사성 회복에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 의정부 터의 역사성 회복을 위한 광화문 시민열린마당 보존·정비·활용 기본계획(본부장방침 제2163호, ’15.2.3.)

○ 의정부 터(옛 광화문시민열린마당) 역사성 회복을 위한 의정부 유구보호시설 건립 계획(부시장방침 제16474호, ’20.9.2.)

Ⅱ		의정부지 정비사업 현황

□ 사업 개요

○ 문화재명 : 사적 제558호 의정부지(議政府址) (’20.9.24 지정)

○ 사업대상 : 종로구 세종로 76-14 일대 11,300㎡

(국유지 4,837㎡, 시유지 6,463㎡)

【사업대상지 위치】	【<팔도고금총람도>(1673년) 상 위치】

경복궁

의정부지

경복궁

의정부

○ 사업기간 : 2015~2023년

○ 소요예산 : 27,662백만원(추정)

○ 유적 정비방안

- 발굴조사된 조선시대 의정부, 일제강점기 유구를 원위치에서 보존·관람할 수 있는 시설을 조성하여 광화문 일대의 역사문화경관을 회복

- 의정부 및 육조대로의 역사관광, 교육 프로그램, 스토리텔링 개발 활용

□ 추진 경과

○ 의정부터 정비 및 활용방안 마련을 위한 학술연구 용역 실시(’15.6~’16.4)

○ 1~4차 학술발굴 조사 실시(’16.7~’19.8)

- 조선시대 의정부 주요 건물(정본당·협선당·석획당)과 부속 건물(연지·정자·내행랑 등) 및 일제강점기 경기도청, ’70년대 치안본부 건물 기초가 중첩되어 확인

○ 정비사업을 주관할 총괄계획가 선정 및 운영위원회 운영(’19.10)

- ******(총괄계획가) 및 관련 분야 전문가 등 5인 위촉

○ 의정부지 종합정비계획 수립 학술연구 용역 실시(’19.10~’20.6)

- 의정부 건물 유구를 현위치·원상태로 보존하고 유구를 보호·관람할 수 있는 시설을 건립하며, 후원영역 등 전체를 역사유적 공원으로 조성

○ 훼손을 방지하기 위한 유구 임시보존 처리 실시(’19.12~공사 전)

○ 의정부지 유구보호시설 국제 설계 공모 추진(’20.7~’20.11)

○ 의정부 유구 전시를 위한 기본설계 용역 실시(’20.6~’20.12)

- 의정부 유구 및 육조대로 관련 컨텐츠 전시를 위한 기본 계획 수립

○ ‘의정부지’ 사적(제558호)으로 지정(’20.9.24.)

- 사적 지정에 따른 공사비 70% 국비 확보 가능

○ 의정부지 종합정비계획에 대한 문화재청 및 사적분과 문화재위원 자문회의 개최(’20.11.11.)

- 단기) 조선시대 의정부 주요 유구에 대한 보호시설을 건립하고 주변 공원 조성

- 장기) 경복궁 복원 계획을 고려하여 조선시대 의정부 복원 추진

Ⅲ		설계용역 시행계획

○ 용 역 명 : 사적 제558호 의정부지 유구 보호시설 기본‧실시설계 용역

○ 용역기간 : 계약일로부터 6개월

○ 과업대상 : 종로구 세종로 76-14 등(옛 광화문시민열린마당) 5필지

○ 대상규모 :【토지】11,300㎡,【건물】1,300㎡ (유구 보호·관람 시설 신축)

- 전 시 관 : 연면적 1,300㎡(±5% 범위 내 조정 가능), 높이 9m 미만

- 유구보호각 : 정본당과 석획당 1,100㎡ (연면적 제외)

- 유구 정비 : 협선당, 연지, 정자, 근대유구(경기도청사)

【주요 유구 배치도】	【공간별 평면 계획】

○ 과업내용

- 현황 측량, 지반조사, 지장물조사 등 실시설계에 필요한 제반조사

- 건축·구조·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방분야에 대한 기본설계(계획,중간) 및 실시설계

- 문화재수리법 및 ‘의정부 유구 보호시설(관람·편의 시설 포함) 조성’을 위한 기타 관계 법령에 따른 각종 심의, 협의, 인허가 등 단계별 행정절차 이행과 자료 작성

- 각종 인증(녹색건축, 에너지효율, BF, 제로에너지 등) 관련 설계 및 인증 취득

- 기타 본 과업의 수행을 위하여 발주기관에서 계약당사자와 협의조정하는 사항 등

○ 추진방식 : 설계용역 시행(역사문화재과), 분야별 설계 감독(도시기반시설본부)

○ 소요예산 : 금 803백만원(부가세 포함) 【국비 140백만원, 시비 663백만원】

※ 환경 등 관련 각종 인증 획득에 소요되는 수수료(300백만원 추정)는 진행 시 업체와 협의, 별도 방침 수립 후 실비 지급 예정

○ 예산과목 : 문화본부 역사문화재과, 역사문화유산의 계승발전, 문화재 보존 복원(일반회계)

- 국가지정문화재 보수정비/시설비 : 200백만원 (국비 140백만원, 시비 60백만원)

- 의정부터 정비/시설비 : 603백만원 (전액시비, 이월예산)

○ 계약방법 : 국제 설계 공모 당선사와 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제4호 자목

○ 용역수행(당선사) : ㈜건축사사무소 원오원아키텍스 외 2개사(공동수급체, 분담이행)

- ㈜건축사사무소 원오원(건축 등)/ 건축사사무소 강희재(문화재)/ 조경설계 서안(조경,부대토목)

Ⅳ		설계자문 및 감독계획

○ 관련분야 전문가(서울시‧문화재청 추천)로 설계자문단을 구성하여 사업의 효율성과 전문성 제고

- 의정부지 정비사업 총괄계획가, 운영위원, 문화재청 추천 전문가 등으로 자문단을 구성, 정기·수시 자문회의 개최

- 전통조경, 전기·통신, 기계 등 관련 분야 전문가와 분야별 자문회의 실시

※ 설계 자문회의 구성 및 운영 계획 별도 수립 예정

○ 유구정비 등 문화재 보존·복원분야와 건축·토목 설계가 복합된 사업 특성 고려하여 각 분야별 전문부서 간 협업으로 내실있는 설계 추진

- 역사문화재과 : 유구의 보존·복원 등 문화재 설계분야 감독

- 도기본(건축부/설비부/방재부) : 유구보호시설(관람,전시,운영 시설 포함) 및 기타시설 조성 시 건축, 토목, 기계, 전기·통신, 소방 등 분야별 설계 감독

※ 설계용역 완료 후, 도기본에서 의정부지 유구보호시설 건립 공사 시행

○ 추후 설계(안)에 대한 문화재청 문화재위원회 심의과정이 필수인 바, 설계 전 과정에 있어 문화재청과 협의 후 진행

- 문화재청이 추천하는 위원 2인을 설계 자문단으로 위촉

Ⅴ		추 진 일 정

○ 실시설계 용역 및 문화재청 심의            : ’21.2. ~ ’21.12.

※ 문화재청(보존정책과·수리기술과) 협의 및 문화재위원회(2개 분과) 심의 결과에 따라 설계 변경 및 수행기간 연장 가능성 있음

○ 유구 보존 처리 공사                       : ’21.3. ~ ’23.6.

- 현장 보존 및 유구보호시설 건립 공사 전·후 유구 보양과 보존처리 실시

○ 전시물 실시설계 및 제작                  : ’21.5. ~ ’22.12.

- 유구에 대한 이해 제고를 위한 영상·모형 등 제작

○ 유구 보호시설 건립 공사의뢰 및 시공(도기본) : ’22.1. ~ ’23.3.

※ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준과 현장여건 따라 공기 변동될 수 있음

○ 전시물 설치 공사 및 개관 준비            : ’23.1. ~ ’23.6.

○ 시범 운영 및 개관                           : ’23.6.

붙임 : 1. 과업내용서

2. 설계용역비 내역서.  끝.