문서번호	설비부-12305
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	08/27 김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

총차 및 1차 계약금액 변경 검토보고

2021. 8월

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

총차 및 1차 계약금액 변경 검토보고

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』시행 중, 건축 골조 공사가 지연되면서 1차 내역을 조정하고자 하며, 주휴수당 관련 법규마련에 따라 공사비에 반영하고자 검토보고 드림

******************************************************

***************************************************************

1		공사개요

○ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

○ 규    모 : 지하 2층/지상 7층, 연면적 2,711,51㎡

○ 계약현황

(단위 : 원)

차 수	계 약 금 액	계 약 기 간	계 약 업 체
총 차	***********	2020.08.12. ~ 2022.08.11.	중앙씨앤티(주)
1 차	**********	2020.08.12. ~ 2021.08.31.

○ 건설사업관리단 : 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 외 1개사

2		관련근거

○ 건설사업관리단 설계변경 검토보고(광역 CM-0177호, ’21.08.26.)

3		검토내용

○ 설계변경 사유

- 공사 시행 중 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」등 주휴수당 지급 관련 규정이 마련되어 공사비에 반영

- 1차 공사를 완료하기 위해서는 건축의 골조가 지상 7층까지 완료되어야 하나,

현재(’21.8월) 지상 1층 바닥까지만 완료된 상태로 소방 배관 공사 등을 시공할 수 없기에, 1차 준공기한 내에 시공가능한 물량을 재산출하여 1차 공사 내역을 조정하고자 함

○ 총차 및 1차 주요 변경내용

구 분	당 초	변 경
총 차	‣ 원가계산서에 주휴수당 및 전자인력 관리단말기 비용 미반영	‣ 원가계산서에 주휴수당 및 전자인력 관리단말기 비용 반영
1 차	‣ 통신 설비공사 배관 물량의 14.5% 반영	‣ 통신 설비공사 배관 물량의 2.5% 반영

○ 도급비 변경내역

- 총차

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
직 접 비	***********	***********	*
간 접 비	**********	**********	*
고용개선지원비	*	**********	*************	주휴수당
공 사 원 가	***********	***********	*************
부 가 가 치 세	**********	**********	*************
총 계	***********	***********	*************

- 1차

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
직 접 비	0101. 통신 설비공사
	010101. 통합배선 설비공사	**********	*********	*************
	010102. CATV 설비공사	*	*******	*************
	010103. CCTV 설비공사	*	*******	*************
	010104. CABLE TRAY 설비공사	**********	*	*************
	소 계	**********	*********	*************
간 접 비		*********	*********	*************
공 사 원 가		**********	*********	*************
부 가 가 치 세		*********	*******	*************
총 계		**********	*********	*************

- 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
총 차	***********	***********	*************
1 차	**********	*********	*************

※ 계약기간 변경없음

○ 건설사업관리단 검토의견

- 하절기 우기 등으로 인한 건축공사 지연으로 통신공사에서 시공가능한 부분으로 시행하기 위하여 1차 내역을 조정하여 2차 공사로 반영하는 것이 적정하다고 판단됨

- 실정보고 승인사항에 대한 변경물량 및 주휴수당을 공사비에 적정하게 반영함

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단의 의견과 같이 공사비에 주휴수당을 반영하고 시공 가능한 부분으로 1차공사 내역을 조정하는 것이 적정하다고 판단되어

○ 내역변경 후 2차공사를 조속히 발주하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부