문서번호	급수운영과-16380
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
박재성	박장진	代박장진		08/27 김정애
협 조

『2020-1년 용산구 관내 상수도공사』

설계변경에 따른 계약금액 조정 결과보고

2021. 08

중부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『2020-1년 용산구 관내 상수도공사』

설계변경에 따른 계약금액조정 결과보고

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 2020-1년 용산구 관내 상수도공사(장기계속 계약공사)

나. 공사개요 : (당초) D=13〜300㎜, L=305m (변경) D=13〜300㎜, L=638m

다. 계약기간 : 2021. 03. 31 ~ 2021. 08. 31.

라. 계약상대자 : ***************

마. 설계변경금액 : **********

*************************************************************

2. 관련 공문

가. 안전조사과-7885(2021.08.26) 계약금액 조정 결과통보

******* 조정요청금액

**************************************************

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경 개요

구 분	금 액(원)
	당 초	변 경
도 급 비	***********	***********	********

4. 심의 내용 및 검토내용

가. 설계변경의 타당성

나. 물량 증 ▪ 감  적용 ,신규공종 및 신규사급자재 적정여부

다. 검토 내역(조정)

▸ 제경비 조정

• 건설하도급발급수수료 삭제

• 환경보존비 삭제

• 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 삭제

5. 조치 의견

-  본부 계약금액 조정결과에 의거 계약의뢰하고, 조정결과를 정산시행 시 반영코자 합니다.

붙임문서 :  1) 계약금액 조정 통보서

2) 조정결과 검토서 1부.

3) 설계변경 내역서(조정 후) 1부.  끝.