투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신

안녕하십니까?

바쁘신 가운데도 불구하고 시정에 관심을 가져주신 점 감사의 말씀을 드리며, 문의하신 위례선 관련 사항에 대해 답변 드리겠습니다.

우선 위례선은 '08년3월부터 LH가 위례신도시 택지개발사업 광역교통개선대책으로 추진하였으나 '18년7월 KDI로부터 민자사업 부적격 판정을 받게 됨에 따라, 국토교통부·서울시·LH 등 관련기관 협의를 통해 공공(서울시)주도 시행으로 '19년 5월 업무협약체결이 이루어졌습니다.

'19년 5월 위례선 사업을 이어 받은 우리 시는 '19년7월 중앙투자심사를 완료하고, 기본계획 승인을 위한 용역을 발주·진행하여 국토교통부로부터 '20년10월 위례선도시철도 기본계획 승인을 득하였습니다.

이후 '20년11월부터 수차에 걸쳐 공사수행방식 결정(설계·시공 일괄입찰방식) 및 적정공기 산정을 위한 건설기술심의, 발주방법 적절성 검토을 위한 계약심의위원회 심의와 입찰안내서·건설기준 등에 대한 자문회의를 시행하고 지적사항을 보완 후 '21년 5월 입찰공고하여 현재는 2개의 설계시공 일괄입찰 참여사가 기본설계를 진행 중이며 '21년 12월말 최종 실시설계적격자를 선정하고 공사 계약을 체결할 예정입니다.

다만 우리 시는 당초 위례선의 '24년말 위례선 개통을 목표로 추진하였으나 LH 광역교통개선부담금과 위례선 기본계획 용역결과 총사업비에 차이가 있어, 총사업비 추가 확보 및 국토교통부 승인을 위한 협의 등에 시일이 추가로 소요되었고, 공사기간은 건설기술심의에서 심도 있는 검토결과 45개월로 결정되어 부득이 '25년 9월 개통으로 목표를 조정하였습니다.

공사기간에 대하여는 건설기술심의(공사기간 적정성)에서 국내 최초로 시공되는 트램 사업임을 감안, 공사장 및 주변지역 안전관리와 품질관리를 위해 적정 공사기간을 45개월로 결정되었음을 알려드리오니 이해 있으시길 바랍니다.

아울러 위례선 트램 차량 구매는 '21년 5월 조달청 공고를 시행하였으나 '21.8. 19. 무응찰로 유찰되었습니다. 이에 우리 시는 지방계약법 시행령 제19조에 의거 즉시 재공고하여 '21. 9. 1.개찰 예정입니다.

향후 재개찰 시에도 무응찰로 유찰될 경우,「위례신도시 광역교통개선대책 트램사업 추진을 위한 업무협약」에 따라, 각 관계기관(국토교통부, 서울특별시, LH)과 실무회의를 통해 사업추진 방안에 대해 협의할 예정이며, 동시에 무응찰 방지를 위하여 제작사에 입찰 참여를 적극 독려할 계획입니다.

기타 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 도시기반시설본부 [도시철도계획부(위례선도시철도 건설:02-772-7159), 도시철도설비부(트램차량 구매:02-772-7289)]로 전화주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							전용현			경전철설계과장					박범진					도시철도계획부장					08/27 정대현
협조자				주무관						이은석					차량과장							代곽동헌
시행			도시철도계획부-6993									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 10층 도시철도계획부															/
전화		02-772-7159						/전송			02-772-7304					/	solarjun@seoul.go.kr												/	부분공개(6)