투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역외 1건」준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-16613호(2021.8.31.)호와 관련입니다

2. 우리 부에서 시행 중인「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역외 1건」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역외 1건

나. 용역규모 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계(연결로 5개소, 지하차도 변경 등)

다. 설계변경내역

구 분	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
용역기간	당초 : '17.8.7.~'21.08.31. 변경 : '17.8.7.~'21.11.30.	당초 : '17.8.11.~'21.08.31. 변경 : '17.8.11.~'21.11.30.
용역사	㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링,㈜지아이건설기술그룹, ㈜수성건설엔지니어링	㈜제일엔지니어링종합건축사사무소
용역금액	3,402,691,000원	389,526,000원

라. 설계변경사유 : ************따른 관계기관(서울지방국토관리청 등) 사전 협의 지연 및 설계 행정 절차(공공디자인위원회, 설계자문회의 등) 시행으로 인한 설계기간 (3개월) 연장 필요

마. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 건설사업관리 검토의견서 1부.

3. 합의각서 각 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	한병찬		토목부장	08/31 임춘근
협조자
시행	토목부-16641	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(7)