투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 공기연장에 따른 감리원 투입기간 변경계획 알림

1. 신림동부2021-400호(2021.7.5.),신림선(2공구)21-210호(2021.7.5.), 신림(3공구)제2021-221호(2021.7.5.)및신림신성-2021-299호(2021.7.5.)와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업 「공기연장에 따른 감리원 투입기간 변경계획」을 다음과 같이 알려드리오니 추후 변경계약 및 감리업무에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 추가 소요예산은 실시협약상 당초 감리비의 잔액에서 집행할 계획으로 ㈜남서울 경전철에서는 이에 대한 의견을 2021.9.3(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

다                   음

가. 건 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 공기연장에 따른 감리원 투입기간 변경계획

나. 용역기간

- 당 초 : 2011. 11. 01 ~ 2022. 03. 07

- 변 경 : 2011. 11 .01 ~ 2022. 06. 28

다. 용역연장 내용

- 토목분야 : 각 공구건설사업관리기술자 2명(책임감리1, 보조감리1)

- 건축분야 : 1공구 건설사업관리기술자 1명(보조감리1)

- 현지 사무원 :각 공구 1명

- 손해배상공제보험 : 각 공구 연장된 공사기간으로 가입기간 연장

- 감리월간보고서 제출을 위한 각 공구 인쇄비 반영 등

라. 소요예산 : 약 6.7억원(부가세 포함, 경상가)

- 실시 협약상 당초 감리비의 잔액에서 집행.

붙임 1. 신림선 경전철 민간투자사업 공기연장에 따른 감리원 투입기간 변경계획. 1부.

2.  신림선 공기연장관련 건축감리 투입검토의견 회신. 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)남서울경전철 대표이사,신림선1~4공구 책임감리원
주무관	김익기		신림선과장	김상용		도시철도사업부장	09/02 이철
협조자	주무관	이나영		주무관	조규영		주무관	원길묵
주무관	박노성		공정관리과장	최문기
시행	도시철도사업부-7937	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02)772-7179	/전송	02)772-7305	/		/	부분공개(5)