문서번호	토목부-21002
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	11/02 김용제
협조

고덕교 종방향 신축이음장치 철거/설치 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

2020. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

고덕교 종방향 신축이음장치 철거/설치 검토보고

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

『고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사』의 실정보고(종방향 신축이음장치철거/설치)과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

**************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-276호(2020.10.22.): 실정보고(종방향 신축이음장치 철거/설치)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사

□ 규    모: 고덕교 차도확장(4차로 →6차로), 교량접속 캔틸레버 보도 설치(교량 양측 각 B=2.5m)

□ 사업기간: ’19.01.18. ~ ’20.12.31.

□ 도 급 비: 1,631백만원(1차 1,564백만원)

***********************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 고덕교 횡방향 구배조정에 따른 종방향 신축이음장치 재설치 필요

〇 종방향 신축이음장치 현황 도면 및 사진

단 면 도	현황사진

〇 고덕교 슬라브 구배 조정으로 인한 포장 계획고 변경(단차발생 약 4cm)으로 종방향 신축이음장치의 유지보수의 편리성 및 교량의 안전성을 고려하여 개량이 요구됨

□ 종방향 신축이음장치 재설치(안)

**	*******	****
***	*	*
*** ***	************************************************* ******************************************* **************************************

※ 붙임 종방향 신축이음장치 비교표 참조

□ 물량 및 공사비 증감 현황

〇 수량 증감내역

****	***	***	***	***	***
*********	*****	*	*	****	****

〇 단가적용

(단위 : 원)

******	***	**	****	**** ************	****
신축이음 철거/설치	t=3cm	m	758,034	707,903	야간

※  신규비목 적용

▸ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조   (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)  ⇒ 협의률 적용【86.774%+100%/2=93.387%】

○ 공사비 증감현황

(단위 : 천원)

*****		****	****	***
* * *	****	*	******	******
	*****	*	*****	*****
	*	*	******	******
*******		*	******	******

□ 책임건설사업관리기술인 검토의견

○ 기존 교량의 슬라브 면고르기(횡단경사조정)에 따른 기존 종방향 신축이음부와 교면포장 계획고와의 단차 발생으로 종방향 신축이음장치 재 설치가 요구되며,

○ 신규 자재의 선정에 대하여서는 관련 제품에 대한 비교 검토를 통하여 구조적 안전성과 유지관리의 편리성을 확보한 제품으로 판단되어지며,

○ 계약 당사자의 책임없는 사유로 인한 물량증감으로 협의율 적용이 적정하며 또한 작업중 안전한 작업환경 조성과 시민의 불편 최소화를 위하여 종방향 신축이음 장치에 대하여서는 야간공사가 타당함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 상기 실정보고 내용과 같이 고덕교 횡방향 구배조정에 따른 종방향 신축이음장치 재설치 사항으로 적정하다고 판단되므로

□ 우선 시공사에게 시공하도록 하고, 추후 설계변경 시 반영하여 정산을 시행하고자 함.

붙임  1. 교량 종방향 신축이음장치 비교표

2. 실정보고(종방향 신축이음장치 철거/설치 ) 공문 1부.  끝..