투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(제1회) 시행(2021년 도로시설물 세척용역)

우리 사업소에서 시행중인 『2021년 도로시설물 세척용역』과 관련하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2021년 도로시설물 세척용역

나. 용역기간 : 2021. 3. 30 ~ 2021. 12. 31.

다. 도 급 자 : 주식회사 코드원  대표 서보경

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비		1,406,717,820	1,699,380,000	증) 292,662,180
도급비	계	1,406,717,820	1,699,380,000	증) 292,662,180
	공급가액	1,278,834,382	1,544,890,910	증) 266,056,528
	부가가치세	127,883,438	154,489,090	증) 26,205,652

마. 설계변경 사유

- 가을맞이 및 후반기 도로시설물 세척시 가용예산 부족으로 인한 세척물량 증·감에 따른 변경

- 일상유지보수 도로시설물 세척용역 낙찰차액(292,662천원) 사용

바. 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설 관리(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 교량안전과, 일반교량관리(도시개발특별회계), 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경(제1회) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

								서울특별시 서부도로사업소장
주무관							권순회				시설보수과장					오재영					서부도로사업소장					09/02 김영철
협조자				주무관							장재영					관리단속과장							박성주
시행			시설보수과-7441										(						)		접수												(						)
우	03918					서울시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소																/
전화		02)300-8371							/전송			02)300-8384					/	plpel@seoul.go.kr													/	부분공개(5)