문서번호	시설관리과-16796
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	양창진	유명은		09/02 박기용
협 조

『2021년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가)』

설계변경 검토보고

2021. 09.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가)』

설계변경 검토보고

우리사업소에서 시행중인 『2021년 자동제어설비 유지관리 용역』의 계약물량 변동 에 따른 설계변경 사유가 발생하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가)

○ 계약상대 : *****************

○ 계약금액 : *******************************

○ 용역기간 : 2021. 04. 01. ~ 2022. 03. 31.
- 1차수) 2021. 04. 01. ~ 12. 31.
- 2차수) 2022. 01. 01. ~ 03. 31.

○ 용역내용 : 배수지·올림터 등 제어설비 유지보수(정기점검 및 제어설비 부품 교체 등)

○ 용역대상 : 22개소

계	제어센터	배수지	아리수올림터	증압장	비 고
22	1	6	5	10

Ⅱ	검토내역

○ 설계변경 사유 : 계약물량 변동

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증/감	비 고
총계약금액		**********	**********	*
1차수	‘21년 계약금액	**********	**********	************
2차수	‘22년 계약금액	**********	**********	************

※ 계약기간 : 변동없음

○ 물량변동내역

공 종	규 격	단위	당초 물량	변경 물량	물량 증감	변경사유
MAIN CPU MODULE	최대 I/O점수 3072점,프로그램메모리 1MB	EA	2	0	(감)2	· 1차수 계약물량 공종 (감)발생
POWER SUPPLY MODULE	AC 220V ±DC5V 5A DC24V 0.7A 입력전용	EA	2	0	(감)2
C-NET MODULE	RS232C, RS422	EA	1	0	(감)1
DIGITAL INPUT MODULE	DC12/24V 입력16점 싱크/소스타입	EA	2	0	(감)2
DIGITAL OUTPUT MODULE	16점 릴레이 출력2A	EA	2	0	(감)2
ANALOG INPUT MODULE	전압/전류입력 8CH DC-5~5V DC-20~20mA	EA	2	0	(감)2
통신서지보호기 (SPD)	2Wire 4~20mA	EA	2	0	(감)2

Ⅲ	행정사항

○ 계약물량 증감 등 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고 심의 결과를 반영하여 변경계약하고자 함.

붙임 : 1. 변경내역서 1부
2. 합의서 1부.  끝.