문서번호	건축부-14060
결재일자	2021. 9. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
양희식		박근우	09/03 신명승
협조
	체육시설팀장		정경옥

「서울 어울림체육센터 건립공사」TF회의 결과 보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

서울 어울림체육센터 건립공사 TF회의 결과 보고

「서울 어울림체육센터 건립공사」중앙투자심사 결과에 따른 향후 추진일정 등 협의를 위한 관계자 TF회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※ 중앙투자심사 결과(‘21. 8.13.) : 조건부 추진 (보완 후 2단계 심사 이행)

Ⅰ		회의개요

❍ 일시/장소 : ’21. 9. 2.(목) 14시 / 도기본 13층 회의실

❍ 참 석자   ※ 코로나 상황 고려 필수 인원만 참석

- 도시기반시설본부 : 문화시설과장, 담당자

- 체육정책과 : 체육시설팀장, 담당자

- 건설사업관리용역사 : 책임건설사업관리기술인 외 1

- 설계사 : 자인건축사사무소 소장, DVA 건축사사무소 소장 외 1

❍ 회의내용 : 중앙투자심사 결과에 따른 추진일정 등 협의

******************

***************************************

**************************************

********************************************************

*****************************************

**************

Ⅱ		회의결과

❍ 추진일정 변경

	중앙투자심사			공사발주	공사착공
	사업부서→재정균형발전담당관	중앙심사의뢰	중앙투자심사
당초 (사업비 변경에 따른 재심사)	‘21. 5.31.	‘21. 6.15.	‘21. 8.13.	‘21. 9.	‘21.11.
변경 (2단계 심사 추가)	‘22.11.30.	‘22. 1. 1.	‘22. 2.28.	‘22. 3.	‘22. 5.

※ ‘21년 중앙투자심사 수시 개최 시 의뢰 추진 예정

❍ 중앙투자심사 결과 조치 사항

- 투자심사는 설계과정 도면을 기준으로 심사를 하였고, 실시설계를 진행(완료)하며 장애인 관련 전문가 의견 반영 등 장애인 시설계획이 충분히 고려되었으므로,

- 실시설계 완료 도면을 기준으로 장애인 시설계획 상세 내용을 추가 작성하여 보완 제출

- 장애인 없는 생활환경 예비 인증 완료 (’21. 6.30. 최우수 등급)

- 운영과 관련된 보완 내용은 체육정책과에서 자료 작성

❍ 전체 공사기간 및 공사비 조정

- 「공공건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 훈령 제1140호)」에 의거 공사기간 32개월이 산정되어(당초 24개월), 사업계획기간변경 및 건설사업관리비용 추가 등 필요

- 실시설계 완료(‘21.5.31.기준, 공사비 498.5억)이후 공사 발주시기 지연에 따라 노무비, 제경비 등 상승으로 공사비 증가

건설공사비(건축, 토목, 조경, 기계) : 298억

- 전체 공사기간 및 공사비 조정은 변경계획 방침 예정

❍ 건설사업관리 용역

- 설계완료 후 공사착공 지연으로 배치 건설사업관리 기술인 변경(철수) 불가피

※「건설기술 진흥법 시행규칙」제27조2항5. 3개월 이상 공사 착공이 지연된 경우

Ⅲ		향후계획

❍ ‘21. 9. : 회의내용 결과 통보 (→체육정책과, 도기본 설비부, 방재시설부)

❍ ‘21.10. : 중앙투자심사 보완자료 작성 완료

붙임: 참석자 명부 1부.  끝.