문서번호	시설보수과-6708
결재일자	2021. 9. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	09/03 차창훈
협 조

봉천천복개 보수공사 설계변경(정산) 검토보고

2021. 9.

남부도로사업소

시설보수과

봉천천복개 보수공사

설계변경(정산) 검토보고

『봉천천복개 보수공사』와 관련하여 실정보고사항 반영 및 실제 시공물량 정산에 따른 설계변경(정산) 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 봉천천복개 보수공사

○ 공사기간 : 2021. 4.30.~10.26.

○ 공사개요 : 아스팔트포장 38.9a, 교면방수 3,898㎡

신축이음보수 119.8m, 단면보수 297.5㎡

○ 도급금액 : *********

○ 도 급 자 : 주식회사 웅산건설

○ 예산현황

(단위 : 천원)

총예산	도급비	관급비	이설비 (폐기물)	계약심사 절감액	집행잔액
*******	*******	******	******	***	******

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리,

봉천천복개 보수, 시설비및부대비, 시설비

□ 설계변경내용

○ 설계변경(추진) 사유

- 정밀안전진단 지적사항 조치계획『시설보수과-4867(2021.6.28.)』

· 3련구간 BOX하부 단면보수 추가작업 시행

- 실정보고에 따른 변경『시설보수과-6121(2021.8.11.)』

· 아스콘포장(방수) 및 신축이음 정비 추가작업 시행

- 실제 시공물량 및 제경비(건강보험, 산업안전보건관리비 등) 실정산 반영

□ 주요 공종 변경 내용(증·감)

공 종	규격	단위	수 량		증·감
			당 초	변 경
아스팔트포장	야간	a	****	****	***********
교면방수	야간	㎡	*****	*****	************
상판보수	야간	㎡	****	****	**********
신축이음정비	야간	m	*****	*****	************
단면보수	주간	㎡	*****	*****	**********

□ 공사비 변경사항(증·감)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공 사 비		***********	***********	**	**********
도 급 비	공급가액	***********	***********	**	**********
	부가가치세	**********	**********	**	*********
	계	***********	***********	**	**********
관급자재비		**********	**********	**	*********
이 전 비(폐기물)		**********	**********	**	*********

□ 항후계획

○ 설계변경(정산) 내용이 추가작업지시 반영, 실제 시공물량 및 건강보험료 등 제경비 실정산에 따른 변경사항으로 집행잔액을 활용

○ 상기와 같이 설계변경 및 재계약 의뢰(관리단속과)하여 시설물 보수 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 및 도면 각1부.

2. 추가작업 방침서 2부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.