투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	성남시장(교통기획과장)
(경유)
제목	「위례선 도시철도 건설사업」 관련 회신

1. 우리 시 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 성남시 교통기확과-17452호(2021.8.31.)와 관련하여 우리 시가 진행중인 「위례선 도시철도 건설사업」 추진 사항에 대하여 아래와 같이 알려드립니다.

◇ 「위례선 도시철도 건설사업」 추진 사항

- 우선 위례선은 '08년3월부터 LH가 위례신도시 택지개발사업 광역교통개선대책으로 추진하였으나 '18년7월 KDI로부터 민자사업 부적격 판정을 받게 됨에 따라, 국토교통부·서울시·LH 등 관련기관 협의를 통해 공공(서울시)주도 시행으로 '19년 5월 업무협약체결이 이루어졌습니다.

- '19년 5월 위례선 사업을 이어 받은 우리 시는 '19년7월 중앙투자심사를 완료하고, 기본계획 승인을 위한 용역을 발주·진행하여 국토교통부로부터 '20년10월 위례선도시철도 기본계획 승인을 득하였습니다.

- 이후 '20년11월부터 수차에 걸쳐 공사수행방식 결정(설계·시공 일괄입찰방식) 및 적정공기 산정을 위한 건설기술심의, 발주방법 적절성 검토을 위한 계약심의위원회 심의와 입찰안내서·건설기준 등에 대한 자문회의를 시행하고 지적사항을 보완 후 '21년 5월 입찰공고하여 현재는 2개의 설계시공 일괄입찰 참여사가 기본설계를 진행 중이며 '21년 12월말 최종 실시설계적격자를 선정하고 공사 계약을 체결할 예정입니다.

- 다만 우리 시는 당초 위례선의 '24년말 위례선 개통을 목표로 추진하였으나 LH광역교통개선부담금과 위례선 기본계획 용역결과 총사업비에 차이가 있어, 총사업비 추가 확보 및 국토교통부 승인을 위한 협의 등에 시일이 추가로 소요되었고, 공사기간은 건설기술심의에서 심도 있는 검토결과 45개월로 결정되어 부득이 '25년 9월 개통으로 목표를 조정하였습니다.

- 공사기간에 대하여는 서울특별시 건설기술심의위원회의 건설기술심의에서 국내 최초로 시공되는 트램 사업임을 감안, 공사장 및 주변지역 안전관리와 품질관리를 위해 적정 공사기간을 45개월로 결정되었음을 알려드립니다.

- 아울러 우리 시는 “위례선 트램 차량 10편성 구매” 건에 대해 무응찰 유찰(2회)에 따라, 국내 제작사와 면담 등을 통해 규격 및 사업비 등 전반적인 사항에 대한 내부검토 후 조달청에 재구매 요청할 계획입니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	전용현		경전철설계과장	박범진		도시철도계획부장	09/03 정대현
협조자
시행	도시철도계획부-7189	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 10층 도시철도계획부	/
전화	02-772-7159	/전송	02-772-7304	/	solarjun@seoul.go.kr	/	대시민공개