문서번호	자원순환과-12909
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설관리팀장	자원순환과장
유민석		조경방	전결 09/06 정미선
협 조

2021년 양천자원회수시설 대정비 계획

2021. 9.

자원순환과

2021년 양천자원회수시설 대정비 계획

자원회수시설에 대한 전반적인 점검과 정비로 고장발생을 최소화하고, 시설의 안정적 운영을 위하여 양천자원회수시설 대정비를 실시하고자 함

□ 관련근거

○ 생활폐기물 소각시설 설치운영 지침(환경부, ’12.10.)

○ 양천자원회수시설 위·수탁운영 협약서 제13조(자원회수시설 운영) 제6항

□ 일반현황

○ 시설규모 : 400톤/일(200톤/일 ×2기)  /  준공년도 : ’96. 2. 28.

○ 폐기물 반입자치구 : 3개구(양천구, 강서구, 영등포구)

□ 주요일정

○ 대정비 기간 : ’21. 10. 3. ~ 11. 6.(35일)

- 폐열보일러 내화물 보수 등 주요설비 보수 및 교체 기간을 고려하여 기간 산정

- 비산재 이송장치 교체 등 공통설비 보수를 위해 1,2호기 동시 정비 필요

○ 폐기물 반입중지 : ’21. 9. 18. ~ 11. 3.(47일) (추석연휴 9.20.~22. 포함)

- 통합환경허가 조건에 따라 폐기물 저장조를 모두 비워 기밀성(악취방지, 침출수 누출 등)을 점검하고 저장조 내부를 청소하기 위해 폐기물 반입일정 산출

○ 서울에너지공사 열공급 중단 : 2021. 10. 2.(12:00) ∼ 11. 7.(10:00)

□ 정비계획

○ 정비 세부일정

구 분	대정비 일정(예정)
폐기물 반입중지	2021. 9. 18. ～ 11. 3. (47일)
소각로 운전정지 (1,2호기 동시 정지 예정)	2021. 10. 2. 12:00
시설 대정비	2021. 10. 3. ～ 11. 6. (35일)
폐기물 반입시작	2021. 11. 4.
폐열보일러 검사(법정검사)	2021. 10. 28.
보조버너 점화	1호기	2021. 11. 4. 10:00
	2호기	2021. 11. 5. 10:00
폐기물 투입	1호기	2021. 11. 7. 10:00
	2호기	2021. 11. 8. 10:00

※ 1,2호기 가동시의 보조버너 점화후 폐기물 투입까지는 내화물 보수공사의 내화물 건조일정을 감안하여 산정함

**********************

구 분	합 계	자체 정비	외 주 정 비
			소계	민간위탁사업	연간단가	외주공사 등
정비건수 (건)	32	19	13	5	1	7
**** ****	*********	*	*********	*********	*******	*******

○ 주요 공사내역(외주정비)

구 분	내 용	**** ****	*****
민간위탁사업	공급화격자실 보수	*******	*** ******
	공장동 설비 보온 보수	*******	**** **
	비산재 이송장치 교체	*******	*** ******
	내화물 보수	*******	*** ******
	1호기 여과집진기 필터백 교체	*******	*** ******
	소 계(5건)	*********	*
연간단가	소각로, 부대설비 정비 및 공장동 환경정비	*******	*** ******
	소 계(1건)	*******	*
외주공사 등	공급화격자실 내화물 교체	*******	*** ******
	1,2호기 BAG FILTER COMPARTMENT 보수	******	*
	1,2호기 바닥재 이송장치 보수	******	*
	비산재 이송장치 비상라인 설치	******	*
	안전밸브 점검·교체 및 분출압력 시험	******	*
	에너지 회수효율 산정을 위한 계측기 검·교정	******	*
	폐기물 저장조 청소	******	*
	소 계(7건)	*******	*
총 계(13건)		*********	*

○ 자체 심사내역(1건) : 붙임 “자체심사 결과” 참조

****	***********			***
	****	****	***
************	*******	*******	*****	*****

□ 행정사항

○ 대정비 일정 유관기관 통보

- 양천주민지원협의체, 반입 자치구(3), 수도권매립지관리공사, 서울에너지공사

○ 기관별 협조사항

(반입자치구(3)) 시설 반입중지 기간 중 수도권매립지에 폐기물 반입

(수도권매립지관리공사) 시설 반입중지 기간 중 폐기물 반입 협조

(서울에너지공사(서부지사)) 대정비 기간 소각열 공급 중단

붙임 : 2021년 양천시설 대정비 계획 관련자료 1부.  끝.