더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2021년 월곡산 무장애숲길(2차 구간) 조성공사 설계변경 시행

공원녹지과-17973(2021.09.06.)호와 관련하여 2021년 월곡산 무장애숲길(2차 구간) 조성공사의 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 월곡산 무장애숲길(2차 구간) 조성공사

2. 공사기간: 2021. 5. 31. ~ 9. 7.

3. 공사내용: 무장애숲길 조성 등

4. 도 급 비: 금193,215,000원(금일억구천삼백이십일만오천원)

5. 도 급 자: 다산(주) 대표 신금철

6. 변경사유: 민원사항 및 현장여건에 따른 물량 변경, 제경비 정산 등

7. 변경금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	193,215,000	209,184,000	15,969,000

8. 예산과목: 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계보전사업, 근교산 등산로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 및 변경 사유서 각 1부.

2. 변경내역서 및 검증확인서 각 1부.  끝.

주무관	양재명		생태농업담당	박고운		공원녹지과장	김경욱		도시관리국장	전결 09/06 이창구
협조자	계약담당	신정경		재무과장	고영진
시행	공원녹지과-18018	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 156 (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3692	/전송	02-2241-6565	/	yjm29@sb.go.kr	/	부분공개(5)