등록번호

일자리경제과-49662

주무관

소상공인지원팀장

일자리경제과장

기획재정국장

등록일자

2021.9.6.

권소영

박수미

문현우

09/06

강환복

결재일자

2021.9.6.

공개구분

부분공개(5)

협  조

- 백련시장 환경개선사업 건축・기계 공사 - (준공)설계변경 시행 계획

서 대 문 구

일자리경제과

- 백련시장 환경개선사업 건축・기계 공사 - (준공)설계변경 시행 계획

백련시장 환경개선사업 건축공사에 대하여 설계변경 사항을 아래와

같이 보고드림

Ⅰ		추진근거

□『백련시장 환경개선사업 추진계획』일자리경제과-21850(2021.4.10.)호

□  지방계약법 제22조, 지방계약법 시행령 제73조 ~제75조

□  행정안전부 예규(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준)제13장 ~ 제15장

Ⅱ		공사개요

□  공 사 명 : 백련시장 환경개선사업 건축・기계 공사

□  계 약 일 : 2021. 8. 6.

□  공사기간 : 2021. 8. 9. ~ 2021. 9. 6.

□  시 공 사 : 주식회사 태상종합개발***********

□  공사내용 : 백련시장 내부 천장교체, 바닥공사, 외부도색, 출입구 공사,

에어컨 및 전열교환기 설치 등

□  계약금액 : ********************************

- 변경계약금액 :*********************************

Ⅲ		설계변경 검토

1) 실정보고 수량변경 검토

품명	규격	단위	당초	변경	증∙감	비고
건축 : 타일공사
자기질타일	자기질타일, 무유, 150*150*6.5~8	M2	63	130	67	변경
타일 압착 붙이기 (바탕18mm+압5mm)	바닥, 150*150(타일C, 회색줄눈)	M2	61	128	67	변경
건축 : 수장공사
비닐타일 깔기	비닐타일, 3*100*920, 데코타일	M2	67	0	-67	변경
기계 : 장비설치공사
순간온수기	30L	개소	0	4	4	신규
순간온수기 배관작업		개소	0	4	4	신규
주방후드(STS)-변경전	1000*500	개소	4	0	-4	변경
주방후드(STS)-변경후	700*1500	개소	0	4	4	변경
기계 : 가스배관공사
가스배관공사 제외	변경내역서 별도 참조	개소	-	-	-	변경

2) 공사비 증·감 검토                                  (단위 : 원, 직접비 기준)

품명	규격	변경전	변경후	증∙감
건축 : 타일공사
자기질타일	자기질타일, 무유, 150*150	1,271,466	2,623,660	1,352,194
타일 압착 붙이기 (바탕18mm+압5mm)	바닥, 150*150(타일C, 줄눈)	2,649,047	5,558,656	2,909,609
건축 : 수장공사
비닐타일 깔기	3*100*920, 데코타일	1,468,372	0	-1,468,372
기계 : 장비설치공사
순간온수기	30L	0	2,000,000	2,000,000
순간온수기 배관작업		0	800,000	800,000
주방후드(STS)-변경전	1000*500	2,808,032	0	-2,808,032
주방후드(STS)-변경후	700*1500	0	3,600,000	3,600,000
기계 : 가스배관공사
가스배관공사 제외	변경내역서 별도 참조	2,620,364	0	-2,620,364

3) 감리 검토 의견

○ 위와 같이 실정보고를 검토한 결과, 당초 순대국 바닥마감이 데코타일로 설계되어 있으나, 내구성 유지 및 사용자 요구사항에 의하여 자기질타일로 설계변경하는 것이 타당하며,

○ 순간온수기는 당초 설계도면에 없었으나, 환경개선공사후 인테리어 효과 및 사용자 요구사항에 의하여 순간온수기를 바닥에 4곳 신설하는 것이 타당하며,

○ 당초 설계도면의 조리대 대비 작은 사이즈로 인하여 주방후드를 700*1500으로 변경하여 설치하는 것이 타당하며,

○ 가스배관공사는 당초설계도면에 있었으나, 현장여건과 중복되어 공사비를 제외하는 것이 타당하며,

○ 서울특별시 공사계약 특수조건(제12조 설계변경등) 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (제6절 공사설계의 변경)에 의거하여, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락

∙오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에 해당하므로 설계변경함이 타당함.

○ 따라서, 계약상대자와 공사비 증감하여 설계변경에 반영함이 타당함.

Ⅳ		조치의견

□ 변경공사금액                                             (단위 원)

공사명	변경전	변경후	증감액
백련시장 환경개선사업 건축 기계공사	220,215,360	224,874,100	증4,658,740

□ 감리 의견에 따라 설계변경 내역이 적정하여 공사비증액 설계변경 함.

붙 임 : 실정보고서 및 설계변경내역서 1부.  끝.