문서번호	시설관리과-21590
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
이혜진	김대용	송병욱	09/07 代김호남
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

『2021년 천호대로 장기사용 송배수관 정비공사』

지장물 저촉에 따른 관부설 위치 변경계획

2021. 9.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 천호대로 장기사용 송배수관 정비공사』

지장물 저촉에 따른 관부설 위치 변경계획

우리 사업소에서 시행중인「천호대로 장기사용 송배수관 정비공사」1구간

지장물 저촉에 따른 관부설 위치 변경계획을 보고 드림.

공사현황

○ 공 사 명: 천호대로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간: 2021. 7. 1.~2021. 12. 17.

○ 도 급 비: 890,489,000원

○ 공사개요: D=200~1200㎜, L=415m

○ **********************

추진경위

○ 2021. 1.  1. : 장기사용 송배수관 예산 배정(배정예산 18억)

○ 2021. 4. 22. : 추가예산 검토요청(추가예산 7억 요청⇨배수과)

- 기존관(D1200㎜) 단수시 부단수차단공법 발생 및 기존관 철거 설계반영금액 요청

○ 2021. 4. 30. : 설계방안 회의개최(배수과)

○ 2021. 5.  7.  : 구경 검토서에 의한 구경축소(1200㎜→900㎜)검토

○ 2021. 6. 29. : 송배수관 관계자(공단감독, 도급사) 회의 개최(1차)

-  기존관 정비방법 개선안(반개착식)을 위한 적용 가능구간 횡단굴착 시행

○ 2021. 8. 19. : 송배수관 관계자(공단감독, 도급사) 회의 개최(2차)

- 반개착식 적용 가능구간 추가 횡단굴착, 주요배관(900㎜) 부설 계획 검토

○ 2021. 9. 1. : 송배수관 관계자(공단감독, 도급사) 회의 개최(3차)

- 횡단굴착 결과로 관로 부설가능 위치 확정(신관 부설위치 일부 변경필요)

· 변경구간: 동대문구청사거리⇒신답철교 방향, L=360m)

- 당 초: D=900㎜ L=360m(2~3차선)

- 변 경: D=900㎜ L=120m(2~3차선), L=240m(1차선, 지장물 저촉에 따른 위치변경)

현황 및 문제점

○ 횡단굴착 결과 관로부설 차로 중  일부구간(L=240m)은 지장물(통신, 하수관,도시가스)이 위치하여 관로 부설이 불가하여,  이에 긴급히 일부구간 노선 변경에  따른 도로굴착허가 신청이 필요함에 따라(붙임 1 참조)

○ 도로굴착 허가청인 성동도로사업소에 굴착가능여부 긴급 협의

- 협의결과: 1차선(수도사업소 안)은 도로굴착통제로 굴착 불허하며 반대차선(L=240m)은  굴착 가능함

	< 회의개최 개요>
․회의일시: 2021. 9. 1.(수) 10:00~ 11:20 ․참 석 자: 김대용 팀장, 이혜진 주무관, 서울시설공단 조성오, 도급사 공사관계자 성동도로사업소 담당(하승환주무관, 정원근주무관) ․회의장소: 성동도로사업소 도로보수과 ․회의안건: 1차선 버스전용차로(도로굴착통제 구간) 점용허가 (긴급)협의 요청

조치계획

○ 성동도로사업소 굴착협의 안 반영하여 동대문구 도로과에 도로굴착점용허가서를 제출하여 허가검토 결과에 따라 공사시행.

○ 본 공사의 노선변경 구간 내 추가 확인굴착을 시행하고 부설가능 구간 검토하여 정비방법 계획 수립 예정.

○ 부설계획도

붙 임  횡단굴착 결과 1부.  끝.