문서번호	시설과-5114
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토건시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
정종광	송석주	代고봉채	09/07 이용우
협 조

2021년 토건시설물 정비공사(연간단가) 설계변경 검토 보고

2021. 09.

서부공원녹지사업소

( 시  설  과 )

『2021년 토건시설물 정비공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인『2021년 토건시설물 정비공사(연간단가)』의 공사물량 변경 및 신규공종에 대한 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명: 2021년 토건시설물 정비공사(연간단가)

❍ 사 업 비: 금380,757,750원

❍ 사업내용: 월드컵공원내 노후 토건시설물 정비

❍ 사업기간: 2021. 5. 3. ~ 12. 31.

❍ 도 급 자: 에스유디자인(주)

Ⅱ		설계변경 검토내용

❍ 설계변경 사유

- 작업지시에 따른 공사물량 변경 및 신규공종발생

❍ 주요공종 변경내역

연번	공 종	단위	당 초	변 경
1	조합페인트칠(유성)	㎡	0	2,340
2	차선도색(융착식)문자기호	㎡	0	360
3	원형맨홀설치(차도)	개소	7	2
4	빗물받이 설치(400*1000)	개소	10	2

❍ 공사비 증감내역

[단위:원]

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	346,143,409	346,143,409	-
	부 가 세	34,614,341	34,614,341	-
	도급비계	380,757,750	380,757,750	-

Ⅲ		검토의견

❍ 상기 검토내용에 따라 설계변경 시행 후 중간 정산하여 기성(제1차)처리코자 함

붙임 1. 제1차 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.