문서번호	도시철도건축부-6522
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		건축공사과장		도시철도건축부장
김영준		안종연		09/07 임우진
협 조

「별내선(8호선연장) 1공구 BN1정거장」 관급자재 구매계획 보고

2021. 09.

도시기반시설본부

도시철도건축부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「별내선(8호선 연장) 1공구 BN1정거장」

관급자재 구매계획 보고

별내선(8호선 연장) 1공구 BN1정거장 건축공사 관급자재 구매계획을

보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 별내선 1공구 관급자재 구매요청 [별내 감1-21-362(`21.9.6.)]

○ 지방계약법 시행규칙 [행정안전부, `21.01.07.]

- 제86조(건설공사에 대한 자재의 관급)

○ 조달사업에 관한 법률 시행령 [조달청, `21.08.09.]

- 제11조(계약체결의 요청 등)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동(암사역) ~ 구리시 토펴동(별내지구)

○ 규    모 : 정거장 1개소, 지하2층, 연면적 7,665㎡

○ 공사기간 : ’17. 08. 23. ~ ’23. 08. 21.

○ 공 사 비 : ***************

○ 도급자 / 감리자 : 쌍용건설(주) / 한국종합건축사사무소(건축)

Ⅲ		관급자재 구매계획

□ 설계내역

품 목	규 격	단위	수 량	단 가	금 액	비고
레미콘	25-18-12	㎥	*****	******	**********
화강석판석	물갈기, 30㎜	㎡	*	******	*******
	버너, 30㎜	㎡	***	******	**********
	혼드, 30㎜	㎡	*****	******	***********
속빈콘크리트블록	100×190×390㎜	매	*****	***	*********
	150×190×390㎜	매	******	***	**********
부가가치세	합계의 10%	식	*
합 계					***********

Ⅳ		관급자재 구매 검토

□ 레미콘

설계내역서		구매계획(나라장터)		검토결과
품명	규격	품명	규격
레미콘	25-18-12	레미콘	25-18-120	다수공급자계약

※ 품질 및 자재수급을 검토하여 나라장터의 *****************로부터 구매 요청 예정. (레미콘은 10억원 이상 시 2단계 경쟁 실시)

※ 사용시기 : `21.10. ~ `22.06.

□ 석재

설계내역서		구매계획(나라장터)		검토결과
품명	규격	품명	규격
화강석판석	물갈기, 30㎜	포천석	연마, 30㎜	다수공급자계약 2단계경쟁
화강석판석	버너, 30㎜	포천석	버너, 30㎜	〃
화강석판석	혼드, 30㎜	고흥석	연마, 30㎜	〃

※ 석재 업체 선정은 자재 금액이 1억원 이상으로 다수공급자계약 2단계경쟁에 해당하므로 단가 및 자재수급을 검토하여 5개 업체 선정 후 조달청에서 제안서 평가하여 업체 선정.

※ 사용시기 : `22.03. ~ `22.10.

□ 속빈 콘크리트블록

설계내역서		구매계획(나라장터)		검토결과
품명	규격	품명	규격
속빈콘크리트블록	100×190×390㎜	속빈콘크리트블록	390×190×100㎜	다수공급자계약
속빈콘크리트블록	150×190×390㎜	속빈콘크리트블록	390×190×150㎜	다수공급자계약

※ 품질 및 자재수급을 검토하여 나라장터의 *********으로 구매 요청 예정 (1억원 미만)

※ 사용시기 : `21.10. ~ `22.06.

Ⅴ		관급자재 구매내역 검토

품 목	규 격	수량	설계내역		구매예상액
			단 가	금 액	단 가	금 액
레미콘	25-18-12	******	******	**********	******	**********
화강석판석	물갈기, 30㎜	**	******	*******	******	*******
	버너, 30㎜	****	******	**********	******	**********
	혼드, 30㎜	******	******	***********	******	***********
속빈콘크리트블록	100×190×390㎜	******	***	*********	***	*********
	150×190×390㎜	*******	***	**********	***	**********
합 계				***********		***********

※ 화강석은 2단계 경쟁 후 단가 확정 / 부가세포함

Ⅵ		향후계획

○ 위 검토내용과 같이 레미콘, 화강석, 속빈콘크리트블록 구매추진

붙 임 1) 별내선(8호선연장) 1공구 관급자재 구매요청 1부.  끝.