문서번호	시설보수과-7189
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★시설보수과장	북부도로사업소장
송준행		이화신	09/07 고영준
협 조
	주무관			오광준
	주무관			이영택
	주무관			김영현
	주무관			민병하

2022년 안전점검용역 계획보고(수정)

2021.  09.

북부도로사업소

(시설보수과)

2022년 안전점검용역 계획 보고(수정)

우리사업소에서 유지·관리하고 있는 도로시설물 중 2022년 정밀안전진단 및 점검 대상 시설물에 대해 기반시설 관련 DB정보 구축할 필요로 과업추가하여 용역계획에 변경코자 함.

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 , 제12조

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 2항

□ 정밀안전점검 시행기준 개선사항 안내(기술심사담당관-12064, 2019.6.27.)

□ 안전점검 및 진단 정보 갱신 대가기준 송부(도로시설과-9040, 2021.8.31.)

2		변경사항

□ 안전점검 및 진단 정보갱신대가를 용역비에 반영 (추가)

○ ’	22년 정밀안전진단 및 점검 대상 시설물에 대해 추가과업(기반시설 통합관리 시스템 관련 유지관리이력 DB정보 작성갱신)을 반영하여 각 용역별로 추진

○ 실태조사 대가 기준

시설물 연장	적용 대가기준 산정
1㎞ 이하	(직접인건비+제경비)x 4%
1㎞ 초과 ~ 2㎞ 이하	(직접인건비+제경비)x 3%
2㎞ 초과	(직접인건비+제경비)x 2%

□ 조치계획

○ 위 제시된 사항에 대해 ‘22년 점검용역 과업에 포함 시행하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

3		안전점검 대상

□ 점검대상 : 총 38개 도로시설물

구 분		교량	고가	터널	지하	복개	비 고
정밀안전진단	1	-	-	-	-	1	1종 : 1개 시설
정밀안전점검	37	20	6	3	6	2	1종	: 1개 시설
							2종	: 8개 시설
							3종	: 3개 시설
							종외	: 25개 시설

□ 세부현황

구 분	용 역 명	개소	소요예산(천원)		비 고
			1차심사결과	심사전 (추가)
정밀안전진단	당현천1복개 정밀안전진단 및 실태조사용역	1	*******	*******	○ 당현천1복개 <1종> (B=20.4~38.7m, L=825m)
정밀안전점검	녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사용역	14	*******	*******	○ 교량13개, 고가1개 시설 (강북,도봉,종로) 녹천교,방학교,우이3교,도봉1교,세검1교,배오개다리,새벽다리,나래교,버들다리,오간수교,영도교,문이교,영도교 빨래골교
	화랑고가 등 12개시설 정밀안전점검 및 실태조사용역	12	*******	*******	○ 교량7개, 고가5개 시설(노원,성북) 안암2교,월곡교,성북3교,묵동교, 모래말다리,당현2교,당현3교 화랑고가,돈암차도육교,미아리구름다리,북악스카이웨이1교,북악스카이웨이2교
	공릉터널 등 11개시설 정밀안전점검 및 실태조사용역	11	*******	*******	○ 터널3개,지하차도6개,복개2개 시설 공릉, 동망봉, 솔샘터널 녹천,창동,하계,월계,정릉,인수봉로지하차도 정릉천2복개, 우이천1복개구조물
총 계		38	*********	*********	****************** ******************

4		향후계획

□ 기술용역 타당성 (재)심사의뢰   : 2021. 9.

□ 기술용역 사업수행능력평가 심의 : 2021. 11.~ 12.

□ 안전점검 용역 계약의뢰         : 2022. 1. ~ 3.

□ 안전점검 용역계약 및 착수      : 2022. 3.~ 4.

□ 안전점검 용역완료              : 2022. 12.

붙임   1. 점검 및 진단 5개년 계획 1부.

2. 시설물안전법 시행령 제8조 및 제11조 [별표3] 1부.

3. 기술용역 타당성 심사요청서 1부.

4. 설계내역서 1부.  끝.