문서번호	치수과-15342
결재일자	2021.9.7.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김형대		김경원		민병기		09/07 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술

★ ◉

「전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사(장기계속)」 설계변경(총차1회, 1차1회) 검토 보고

2021. 9.

(안전건설교통국 치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 ☑ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 하천관리과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

「전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사(장기계속)」

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사』의 건설사업관리단(감독권한 대행)으로부터 설계변경(총차1회, 1차1회)가 접수되어 이를 검토하고 보고 드림

□ 관련근거: 공사설계변경 설계서 제출(전농천(감) 제21-48호, 2021.9.6.)

□ 공사개요

❍ 위    치: 전농천(용답동 182번지 일원)

❍ 기    간: ’21.2.26. ~ ’22.5.31.(1차분: ’21.10.31.까지)

❍ 규    모: 연장 600m, 폭 35~42m(전농천 복개 및 반복개 구간)

- 1차: 복개하부 차집관로 신설, 가동보 설치, 보도데크 설치 및 제방도로 정비

- 2~3차: 초기우수처리관로 신설 및 주민친화공간(체육시설 등) 조성

❍ 사 업 비: 8,877,316천원(도급비 3,815,838원, 관급비 4,150,930천원, 이전비 910,548천원)

- 1차: 3,668,841천원(도급비 900,597천원, 관급비 1,965,170천원, 이전비 803,074천원)

❍ 시 공 사: 신안건설산업(주) 대표 우정현

❍ 건설사업관리용역사: 극동엔지니어링(주) 대표 성낙일 외 1개사

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 총차

· 관급자재(철근 및 레미콘 등) 단가 인상에 따른 관급자재비 증가

· 현장 여건 변동에 따른 폐기물 수량 증가로 이전비 증가

· 1차 기 실정보고사항 및 건강·연금보험 등 제경비 정산 반영

- 1차

· 현장 여건 변동에 따른 기 실정보고사항 반영

· 건강·연금보험 등 제경비 정산 및 시기 미도래 공종 차수 이월

○ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총차 1회	총공사비	8,877,316,350	9,000,000,000	증) 122,683,650
	도 급 비	3,815,838,350	3,824,590,000	증) 8,751,650
	관급자재비	4,150,930,000	4,198,932,000	증) 48,002,000
	이 전 비	910,548,000	976,478,000	증) 65,930,000
1차 1회	총공사비	3,668,841,000	2,039,141,000	감) 1,629,700,000
	도 급 비	900,597,000	761,772,000	감) 138,825,000
	관급자재비	1,965,170,000	1,042,827,000	감) 922,343,000
	이 전 비	803,074,000	234,542,000	감) 568,532,000

□ 조치계획

○ 기 실정보고 승인 된 사항, 관급자재 인상분 및 제경비 정산분을 반영하여 요청한 건설사업관리기술인(감독권한 대행)의 보고내용이 적정하여 상기와 같이 설계변경을 시행코자 함

붙임  1. 관련근거 1부.

2. 변경내역서(총차, 1차) 각 1부.

3. 검증확인서(총차, 1차) 각 1부.  끝.