문서번호	물재생계획과-9486
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김병오	정한영	이임섭		07/12 최진석
협 조

「2040 하수도정비기본계획 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2021. 7.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2040 하수도정비기본계획 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2040 하수도정비기본계획 용역관련 본 과업 검토대상에 포함되는 관련사업 등이 현재 추진 중으로 이를 검토, 반영하기 위한 시일이 소요되어 준공기한 연기가 필요하다는 계약상대자의 요청이 있어 이에 대하여 검토 보고드림

1		용역개요

□ 용 역 명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

□ 계약상대자 : ㈜한국종합기술 외 4 개사 컨소시움

□ 계약금액 : 2,850백만원(2차 2,500백만원)

□ 용역기간 : ’20.1.9. ~ ’22.3.7.(2차 : ’20.6.8. ~ ’22.3.7.)

□ 주요 과업내용

○ 서울시 하수도 주요정책 및 시설평가

○ 신규 정책전략 실행화계획 수립

○ 하수도개선 종합계획 수립

○ 하수도계획 통합 업무편람 작성

2		추진현황

□ 2020. 01. 09. : 용역착수

□ 2020. 04. 29. : 착수보고

□ 2020. 06. 01. : 자문회의

□ 2020. 06. 19. : T/F팀 회의(1회)

□ 2020. 07. 23. : T/F팀 정기(2회)

□ 2020. 11. 25. : 자문회의

□ 2021. 03. 25. : 자문회의

3		준공기한 연기 요청내역

□ 과업내용 변경요청 사항(용역비 변경없음)

***		***	***	***
***	****	***********************	***********************	***** ********
***	****	***********************	***********************

□ 변경사유

****************************************************************************************

**************************************************************************************

	*****************
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

4		검 토 결 과

□ 검토의견

*******************************************************************************************

*********************************************************************************

*******************************************************************************************

**************************************************************

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		행정사항

○ 용역수행 계약상대자와 준공연기에 대한 변경계약을 체결

5		향후계획

○ 2021. 7.  : 변경계약 및 자문회의(5차)

○ 2021.11.  : 자문회의(6차)

○ 2022. 3.  : 자문회의(7차)

○ 2022. 5.  : 최종보고 및 환경부 승인요청

○ 2022. 9.  : 용역준공(환경부 승인)

붙임 : 과업기간 연장에 대한 실정보고 1부.  끝.