“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행(2021년 강남,서초구 관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행중인『2021년 강남·서초구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 계약물량 증·감 및 신규공종이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(1차) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 강남·서초구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자: **********************************

다. 공사기간: 2021.05.24 ~ 2022.06.30.

라. 설계변경 금액: 변동없음

(단위 : 원)

구분	설계변경 금액
	당 초	변 경	증,감
도 급 비	1,727,671,000	1,727,671,000	-

마. 설계변경 사유: 현장여건 변동으로 인한 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종 발생

공 종	당초	변경	증․감	비고
아스팔트포장	62.10a	65.14a	증) 3.04a
보도블록포장	12.0a	12.0a	-
아스팔트표층	94.7a	94.3a	감) 0.40a

※ 신규공종: “상수도사업소 유지관리 실태 감사(본부)” 포장복구 다짐장비 조합 지적사항 반영

바. 하자기간: 준공검사일로부터 2년

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 수선유지비,

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설(신설) 보수, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설(신설) 설치, 시설비

붙임: 1. 설계변경(1차) 심의결과 보고 1부.

2. 설계변경(1차) 심의위원회 의견서 1부.

3. 설계변경(1차) 관련서류 각 1부.

4. 포장복구공사 공통대가 지적사항 개선 관련 공문 1부.  끝.

주무관	두충엽		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	최춘근		강남수도사업소장	09/08 박창석
협조자	행정지원과장	이영세
시행	급수운영과-13071	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	02-3146-4848	/전송	02-3146-4889	/		/	부분공개(5)