문서번호	전산정보과-9050
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
정은화	문병기	09/09 안병희
협 조

디지털 서울워터-ON(2단계)구축 사업

월간보고(8월)

2021. 9.

상수도사업본부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

디지털 서울워터-ON(2단계)구축 사업 월간보고(8월)

상수도 산재된 데이터의 통합․연계․실시간 주요 정보를 위치기반 지도서비스 지원 및 의사결정 지원 사업을 위한 8월 실적 보고임

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 디지털 서울워터-ON(2단계) 구축

❍ 계약기간 : 2021.06.15 ~ 2021.12.31.

❍ 계약금액 : ******

❍ 업 체 명 : *******

□ 사업내용

- 빅데이터 기반 15종시스템 주요정보 연계▪통합▪공유 서비스 제공

- 위치기반 실시간 정책지도 연계 서비스(관로, 누수, 공사정보, 생산량 등)

- 공사, 사고 등 현장상황을 모니터링 하여 의사결정 및 정책결정 지원

- 데이터 공동 활용을 위한 메타 표준관리 및 배포, 시각화 변경 지원 등

□ 진행률 보고

❍ 진행률 : 21. 8. 1 ~ 8. 31(26.3%)

구분	진행율 분석
	목표진행률	실적 진행율	계획대비 진도율	상태
전체 공정	27.3%	26.3%	96.3%	정상
착수 및 준비단계	100%	100%	100.0%	정상
분석 단계	41.0%	34.0%	82.9%	협의 지연
설계 단계	19.0%	20.0%	105.3%	정상
구현 단계	4.0%	4.0%	100.0%	정상
테스트 단계	0.0%	0.0%	0.0%	정상
이행 및 완료단계	0.0%	0.0%	0.0%	정상

❍ 단위과제별 진행사항

- [사업관리] 여의도 아리수혁신지구 데이터 활용방안 협의

- [분석관리] 정책지표 및 주요사업 재정비 대상 파악

주요사업 컨텐츠 대상 확정

화상회의 솔루션(WebEx) 검토 → 본 사업 적용 예정

수운영시스템 자료 파악 및 연계 자료 검토

- [설계분야] 스토리보드 작업(정책지표, 주요사업, 음성/화상/웰컴보드)

- [자료수집] 2단계 서비스 자료선정 및 수집

- [시각화]   디자인 1차시안 및 2차시안 선정

화면 레이아웃 확정

- [개발]     운영환경 설정 및 3D홍보물 컨텐츠 제작

※ 이슈 : 수운영시스템의 폐기로 생산, 공급 데이터 연계 차질

(본 사업기간 중 서버는 폐기 보류 협의)

※ 디자인 시안

1안(배경 파란물결)	2안(배경 화이트)

※ 3D 홍보(샘플)

전체화면	착수정

붙임  1. 8월 월간보고서 1부

2. 정책지표 원천데이터 파악자료 1부.

3. 3D 홍보 키오스크 설계자료 1부.   끝.