코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울물재생시설공단이사장
(경유)
제목	서남물재생센터 슬러지건조시설 공정관리 및 예산집행 철저

1. 물재생시설과-2580(2021.2.26.), 서남물재생센터 슬러지건조2단계 설치사업과 관련입니다.

2. 서남물재생센터에서 추진하고 있는 슬러지건조2단계사업은 2022.3월 준공을 목표로 추진하고 있으나 귀 공단에서 제출한“7월 건설사업관리 보고서”에 따르면 계획대비 94.25%(계획62.09%, 진행58.52%) 공정으로 다소 지연되고 있어 요청하오니 계획대로  준공(2022.3)할 수 있도록 공정관리에 최선을 다하여 주시기 바라며,

3. 아울러 2022년 예산 및 이월예산의 현재까지 집행실적 및 9월 이 후 월별 예산지출계획을 수립하여 2021. 9.24(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병용		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	09/09 윤창진
협조자	주무관	김익동
시행	물재생시설과-9797	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 물순환안전국 물재생시설과	/
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개