문서번호	토목과-12449
결재일자	2021.9.9.
공개여부	비공개(5)
방침번호

지방공업주사		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
차정권		임정규		이호진		09/09 최연우
협조

★ ◉

-2021년 광나루로 가로등 개량공사-

기성(2차) 검사 보고

2021. 9.

(토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

-2021년 광나루로 가로등 개량공사-

기성(2차) 검사 보고

우리 구에서 시행중인 ‘2021년 광나루로 가로등 개량공사’ 관련하여 계약상대자로부터 기성 준공계가 접수되어 검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 광나루로 가로등 개량공사

○ 위    치: 광나루로(화양사거리 ~ 치과의사회관 삼거리)

○ 기    간: 2021. 4. 1. ~ 11. 26.

○ 내    용: 등주 설치 53본, 등기구 설치 112등, 분전함 설치 5면, 배관·배선 설치 1식 등

○ 계약업체: ㈜홍재전력(대표 김선웅)

○ 계약금액: 237,811천원

○ 예산과목: 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후 도로조명시설 개량 사업, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

□ 검사내용

○ 기성 준공일: 2021. 9. 8.

○ 기성 준공검사일: 2021. 9. 9.

○ 기성(2차) 금액

(단위: 천원)

구 분	계약금액	전 회		금 회		기성누계		잔 여
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
공급가액	216,192	79,727	36.9%	92,810	42.9%	172,537	79.8%	43,655	20.2%
부가가치세	21,619	7,973		9,281		17,254		4,365
공사비계	237,811	87,700		102,091		189,791		48,020

○ 주요 기성(2차) 내용

연번	공 종	규 격	단위	계약	금회기성	누계	잔여
1	폴리에틸렌 전선관 배관	CD-P 42C	m	1,586	515	1,586	0
2	강제전선관 배관(지중)	아연도 54C	m	58	34	34	24
3	전력케이블 배선	F-CV 6.0㎟*1C, 7열동시	m	10,470	5,454	10,470	0
4	가로등기구 설치	LED100W이하	등	59	59	59	0
5	보행등기구 설치	LED50W이하	등	53	53	53	0
6	가로등 제어반 설치	4회로, 융합형	면	5	5	5	0
7	가로등 기성기초 설치	500*750*1000*1,000	개	53	13	48	5
8	콘크리트 기초 철거	가로등주 높이 12m미만	개	66	61	61	5

□ 조치의견

○ 기성 준공검사 결과 계약내용과 이상없이 시공이 완료되었기에 기성 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 기성(2차)준공 내역서 1부.

2. 기성(2차)준공 사진 1부.  끝.